문서번호	시설관리과-3203
결재일자	2024. 2. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이연한	신동철	02/23
		권승계
협 조
	시설관리팀장		김용섭
	주무관		박민용

『2024년 은평구관내』

장기사용 배급수관 정비공사(연간단가) 추진계획

2024. 2.

서부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2024년 은평구관내』

장기사용 배급수관 정비공사(연간단가) 추진계획

2024년 장기사용 배급수관 정비대상 중 연간단가 정비구간을 조기 정비하여 수질민원 및 누수요인을 사전에 차단하고 깨끗하고 안전한 수돗물을 수요가에 공급하고자 아래와 같이 추진계획을 보고 드림

1		추진배경

ㅇ 덕타일주철관(시멘트라이닝) 중성화로 인한 실코트 박리․박락으로 수질 및 누수사고 등이 발생하는 ’84~85년 덕타일주철관, 취약 상수도관

ㅇ 내부 도장재인 콜타르에나멜 탈락으로 ’79년 이전 매설 강관 정비

※ 추진근거 : 배수과-7320호(‘19.7.30.),누수방지과-8030호(’19.7.19.)

2		'23년 추진실적

ㅇ 장기사용 배급수관 정비 실적(은평구 : 목표-2.0㎞, 실적- 2.1㎞)

연번	공 사 명	공사개요		실적(㎞)	달성률(%)	비고
		구경(㎜)	연장(㎞)
계		80~300	2.0	2.1	105
1	역촌동외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	80~300	1.3	1.15	88.4
2	은평구관내 상수도공사(연간단가)	80~300	0.7	0.95	135.7

< 상수도관 정비 시공 사례 >

- 공 사 명 : 2023년 역촌동외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사

- 공사개요 : D=80~300㎜, L=1,325m

안전시설 및 안전원 배치	직관부설	원형변실 설치	인조잔디매트 설치

3		'24년 추진계획

ㅇ 장기사용 배급수관 정비(은평구 : 목표-2.63㎞)

- 대    상: ’84~85년에 매설된 덕타일주철관 (시멘트라이닝)

누수 및 수질사고 취약 상수도관

- 정비계획

(단위: m, 백만원)

구 분	계		단위사업		연간단가		비고
	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
은평구	2,630	3,680	1,440	1,800	1,190	1,880

- 공사현황

(단위: m, 백만원)

연번	사 업 명	공 사 계 획		사업비 (백만원)	정비 (공정율)	공사기간
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~300	2,630	3,680
1	갈현동외 3개동 장기사용 배급수관 정비공사	80~200	1,440	1,800	계약심사	’24. 3. ~ 11.
2	은평구관내 상수도공사(연간단가)	80~300	1,190	1,880	굴착협의	’24. 3. ~ 11.

4		연간단가 추진계획

ㅇ '24년 장기사용 배급수관 중 은평구에서 정비할 2.63㎞중 단위사업으로 1.44㎞ 발주하고, 1.19㎞는 '은평구관내 상수도공사외 1개사 계약업체에 작업지시하여 조기 정비코자 함.

ㅇ 연간단가 정비구간 현황

연번	동	위 치	정비대상			정비계획		비 고 (시행업체)
			관종	구경 (㎜)	연장 (m)	구경 (㎜)	연장 (m)
계		구간	9구간			150	1,190
1	역촌동	11-42 ~ 11-46	PVC (1986)	80	65	150	65	시설물

연번	동	위 치	정비대상			정비계획		비 고 (시행업체)
			관종	구경 (㎜)	연장 (m)	구경 (㎜)	연장 (m)
2	역촌동	35-1 ~ 35-57	PVC (1986)	80	130	150	130	급수공사
3	불광동	525 ~ 479-951	DCIP (1986)	80	190	150	190	급수공사
4	신사동	26-36 ~ 26-25	DCIP (1986)	80	140	150	140	급수공사
5	신사동	28-432 ~ 28-45	DCIP (1986)	80	140	150	140	급수공사
6	신사동	28-1 ~ 28-11	DCIP (1986)	80	130	150	130	급수공사
7	신사동	37-22 ~ 37-17	DCIP (1986)	80	120	150	120	급수공사
8	신사동	38-1 ~ 38-33	DCIP (1986)	80	95	150	95	급수공사
9	신사동	200-4 ~ 200-19	DCIP (1986)	80	180	150	180	급수공사

ㅇ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 맑은물길 조성, 장기사용 배급수관(350㎜이하)정비, 시설비 및 부대비(40101)

5		조치계획

ㅇ '24년 장기사용 배급수관 정비공사 구간중 연간단가로 시행할 1.19㎞는 정비목표 조기 달성을 위해 '은평구관내 상수도공사, '은평구관내 상수도시설물설치 및 보수공사 업체에 작업지시하여 정비코자 하며,

ㅇ '24년 정비목표 달성 후 사업예산 확보 및 추가배정시 장기사용 배급수관을 추가정비하여 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 정비구간 위치도 1부.  끝.