문서번호	도시철도건축부-1765
결재일자	2024. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
배현중		김광기	02/23
			박신규
협조

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정 보고 검토

2024.  2.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정보고 검토

별내선(8호선 연장) 1공구 정거장 화장실 범죄예방 창의 안심시설

설치에 따른 설계변경 실정보고 검토임

▢ 관련 근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

- 제9장 계약 일반조건, 제6절 공사 설계 변경

ㅇ 별내선(8호선연장) 화장실 범죄예방 창의 안심시설 추진 계획

- 본부장 방침 [도시철도건축부-2509(‵23. 4. 3.)]

ㅇ 별내선(8호선연장) 화장실 범죄예방 창의 안심시설 설치 시행 계획

- 도시철도건축부-1597(‵24. 2. 20.)

ㅇ 별내선 1공구 실정보고 승인요청[도시철도건축부-1760(‵24. 2. 23.)]

▢ 실정보고 내용

ㅇ 화장실 범죄예방 창의 안심시설 설치

- *************************************

************************************************************************************************************

- ********************************

***************************************************************************************

▢ 검토 내용

ㅇ 설계변경 적정 여부 검토 : 적정

- 화장실 범죄예방 창의 안심시설 설치계획에 따른 도시철도건축부 요청사항

· ************************

· ****************************

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장, 6절 (설계변경)

· 1.가.4) 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

ㅇ 계약금액 변경 공사내역 검토

- ********************************************

품 명	단위	단 가	수 량		금 액(원)		증감(원)
			변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
****	*	**********	*	*	*	**********	************
**** *************	**	*********	*	*	*********	*	***********
**** *************	**	*********	*	*	*	*********	***********
****							************

- *********************************

· ************************************

품 명	단위	단 가	수 량		금 액(원)		증감(원)
			변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
*******	*	*********	*	*	*	*********	***********
****							***********

ㅇ 설계변경 금액 총괄

항 목	금 액		증 감
	변경 전	변경 후
**************	*	**********	************
********	*	**********	************
******** *****************	*	*********	***********
****************	*	*********	***********
******	*	**********	************

▢ 검토 결과

ㅇ 관련 법규 및 내역검토 결과 건설사업관리단의 실정보고에 대한 승인이 타당하고 향후 설계변경 처리

※ 건설사업관리단 검토의견

- 발주처 요청(화장실 범죄예방 창의시설 시행계획)에 의한 설계변경으로

수량 및 금액 검토하였으며, 변경 금액은 차후 설계변경 시 반영함

▢ 향후 계획

ㅇ ‵24. 2.  실정보고 승인처리(도시철도건축부 → 건설사업관리단)

ㅇ ‵24. 3.  6차 공사 준공 시 도급내역에 설계변경사항 반영

붙임)   별내선 1공구 실정 보고 승인요청 1부.  끝.