문서번호	운영과-1640
결재일자	2024. 2. 26.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장		서울시립미술관장
정선종	오근	백기영		02/26
				최은주
협 조
	총무과장		이영순
	수집연구과장		전소록

서울시립 북서울미술관 CCTV 고도화 계획

2024. 2. 23. (금)

서울시립미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

서울시립 북서울미술관 CCTV 고도화 계획

서울시립 북서울미술관 노후 출입시설을 전량 교체하여, 미술관 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

ㅇ*************************************************

***********************************************************************************************

**************************************************

*******************************************

ㅇ********************************************************************

□ 시설현황

ㅇ *********

ㅇ 카메라수: 140대

구분	카메라수	*****	****	*******
1	22대	***	*****	*********
2	16대	***	*******************	****
3	14대	***	*******************	****
4	13대	***	*******	*********
5	14대	***	*******	*********
6	27대	***	*******	****
7	5대	***	*****	*********
8	29대	***	*****	****

□ 사업개요

*********************************

***********************************

*******

************************************

******************

********************

*********************************************

******************

□ 추진방향

ㅇ VMS로 통합시 CCTV영상 저장·관제 중지가 발생하지 않도록, 신규 전송시설(CCTV망) 구축 후 신규 CCTV망에 VMS시스템 구축

ㅇ IP카메라 도입 이전 비효율적으로 포설된 CCTV-스위치 선로 재포설

ㅇ VMS로 통합하여 불용되는 NVR은 전시장, 수장고 방재길 이외 장소에 설치하여 이중 저장할 수 있도록 구성

ㅇ 개인정보보호를 위해 영상정보처리 담당자가 근무하는 3층 행정실에서만 영상출납이 가능하도록 구축

ㅇ ********************************************

*******************************

********************************

□ 예산***********

ㅇ 예산과목: 문화예술 진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

ㅇ 세부내역

공사	사업내용	발주방법	소요예산	발주시기
기반공사	*************	****	********	*******
주공사	****************	******** ***	*********	*******
부대공사	**********	******** ***	********	*******

※ 공사간 사업예산 변경(가감) 가능

□ 발주계획

① CCTV망 신규 구축

******************

*******************************

*******************

- 사업내용

․ 방재실 및 MDF실 서버․통신렉 재배치

․ CCTV 네트워크망 구축(스위치 8대 설치 등)

② VMS 및 CCTV카메라 구매 설치

******************

*************************

********************

- 사업내용

․ 카메라 50대 구매설치

․ VMS시스템(스토리지, SAN스위치, VMS서버, 라이센스 등) 구매설치

․ 구축되어 있는 CCTV간선 재포설 등

③ VMS 및 CCTV카메라 구매 설치

******************

*************************

*******************

- 사업내용

․ 방재실 모니터링 설치(비디오월) 구매설치

․ 3층 행정실 영상출납 장비 설치 등

□ 추진일정

ㅇ CCTV망 신규 구축 공사 발주	’24. 2.

ㅇ 특정제품성정심사위원회 개최	’24. 3.

ㅇ VMS 및 CCTV카메라 구매설치 발주	’24. 3.

ㅇ CCTV망 신규 구축 공사 준공	’24. 3.

ㅇ 모니터링 시설 발주	’24. 4.

ㅇ VMS 및 CCTV카메라 구매설치 준공	’24. 5.

ㅇ 모니터링 시설 준공	’24. 5.

□ 협조사항

ㅇ 수장고 CCTV 교체 일정 협의(수집연구과)

ㅇ 공사계약 및 나라장터 종합쇼핑몰 구매(총무과)

붙임: 북서울미술관 CCTV 현황 현황  1부.  끝.

연번	CCTV명칭	위치	전송시설	관리시스템
1	2F 전시실2-1	********	*****	****
2	2F 전시실2-2	********	*****	****
3	2F 전시실2-3	********	*****	****
4	2F 전시실2-4	********	*****	****
5	1F 로비	********	*****	****
6	1F 전시실1-1	********	*****	****
7	1F 전시실1-2	********	*****	****
8	1F 전시실1-3	********	*****	****
9	1F 전시실1-4	********	*****	****
10	1F 수유실	********	*****	****
11	2F 프로젝트2-1	********	*****	****
12	2F 프로젝트2-2	********	*****	****
13	2F 프로젝트1-1	********	*****	****
14	2F 프로젝트1-2	********	*****	****
15	1호기 E/L	********	*****	****
16	B1F 어린이갤러리2-1	*********	*****	****
17	B1F 어린이갤러리2-2	*********	*****	****
18	B1F 어린이갤러리1-1	*********	*****	****
19	B1F 어린이갤러리1-2	*********	*****	****
20	2F 프로젝트2-3	********	*****	****
21	2F 프로젝트2-4	********	*****	****
22	2F 전시실2-5	********	*****	****
23	B1F 3호기 홀	********	*****************	****
24	스튜디오1,2 앞	********	*****************	****
25	B1F방풍실	********	*****************	****
26	조각09	********	*****************	****
27	회화01	********	*****************	****
28	회화10	********	*****************	****
29	조각06	********	*****************	****
30	회화05	********	*****************	****
31	조각01	********	*****************	****
32	회화08	********	*****************	****
33	조각12	********	*****************	****
34	조각16	********	*****************	****
35	B2F 남자휴게실 복도	********	*****************	****
36	수장고 앞 복도	********	*****************	****
37	조각17	********	*****************	****
38	조각18	********	*****************	****
39	1층카메(외부)	*****	*****************	****
40	기계실	*****	*****************	****
41	썬큰가든	*****	*****************	****
42	기계실	*****	*****************	****
43	부출입구	*****	*****************	****
44	B1F 계단2	*****	*****************	****
45	M1F 계단1	*****	*****************	****
46	B1F 계단1	*****	*****************	****
47	1F화장실 복도	*****	*****************	****
48	B2F계단1	*****	*****************	****
49	B2F계단2	*****	*****************	****
50	임시수장고	*****	*****************	****
51	전실02	*****	*****************	****
52	발전기실	*****	*****************	****
53	조각테라스1	********	*******	****
54	조각테라스2	*******	*******	****
55	주차장출입구	*******	*******	****
56	동쪽방향계단2	*******	*******	****
57	동쪽계단앞	*******	*******	****
58	경비실쪽계단	*******	*******	****
59	동일로 카페방향	*******	*******	****
60	별광장	*******	*******	****
61	행정실3층	*******	*******	****
62	버스정류장	*******	*******	****
63	주차장외곽스피드돔	*******	*******	****
64	별무대스피드돔	*******	*******	****
65	별광장	****	*******	****
66	M1 주차장램프	*********	*******	****
67	M1 주차장	*********	*******	****
68	M1 주차 입차	*********	*******	****
69	M1 주차	*******	*******	****
70	M1 주차	*******	*******	****
71	M1 주차	*********	*******	****
72	M1 주차	*********	*******	****
73	B1 주차	*********	*******	****
74	B1 주차	*********	*******	****
75	B1 주차	*********	*******	****
76	B1 주차	*******	*******	****
77	B1 주차	*******	*******	****
78	B1 주차	*********	*******	****
79	B1 주차	*********	*******	****
80	M1 3호기 앞	*********	*******	****
81	B1 화물E/L 앞	*********	*******	****
82	3F 행정실 방풍문	********	*******	****
83	A동 3층 2호기 E/L앞	********	*******	****
84	A동 2층 전시실	********	*******	****
85	A동 2층 전시실2 앞	********	*******	****
86	A동 2층 전시실	********	*******	****
87	A동 2층 프로젝트	********	*******	****
88	B동1F 부출입구	********	*******	****
89	2호기E/L	********	*******	****
90	3호기E/L	********	*******	****
91	A동 1F 로비대각선위	********	*******	****
92	A동 1F 카페출입구	********	*******	****
93	B동 3호기 E/L앞	********	*******	****
94	A동 1F프로젝트1 앞	********	*******	****
95	A동 B1F 어린이갤러리	*********	*******	****
96	A동 B1F 다목적실	*********	*******	****
97	B동 2F복도	********	*******	****
98	화물E/L	********	*******	****
99	1F하역장	********	*******	****
100	아트라이브러리	********	*******	****
101	아트라이브러리	********	*******	****
102	아트라이브러리	********	*******	****
103	아트라이브러리	********	*******	****
104	아트라이브러리	********	*******	****
105	기계실(스피드돔)	*******	*******	****
106	전기실	*******	*******	****
107	3층 이음길1(전원-방재)	********	*****	****
108	3층 이음길2(전원-방재)	********	*****	****
109	3층 이음길3(전원-방재)	********	*****	****
110	3층 이음길4(전원-방재)	********	*****	****
111	3층 이음길5	********	*****	****
112	수장고앞 복도1	*********	*****	****
113	수장고앞 복도2	*********	*****	****
114	흡연공간	********	*****	****
115	하역장 어안 01	********	*****	****
116	임시수장고 돔 01	*********	*****	****
117	임시수장고 어안 01	*********	*****	****
118	작품보관실 어안 01	*********	*****	****
119	전실 돔 01	*********	*****	****
120	전실 어안 01	*********	*****	****
121	조각 돔 01	*********	*****	****
122	조각 돔 02	*********	*****	****
123	조각 어안 01	*********	*****	****
124	조각 어안 02	*********	*****	****
125	조각 어안 03	*********	*****	****
126	조각 어안 04	*********	*****	****
127	조각 어안 05	*********	*****	****
128	조각 어안 06	*********	*****	****
129	조각 어안 07	*********	*****	****
130	조각 어안 08	*********	*****	****
131	조각 어안 09	*********	*****	****
132	조각 어안 10	*********	*****	****
133	조각 어안 11	*********	*****	****
134	회화 돔 01	*********	*****	****
135	회화 돔 02	*********	*****	****
136	회화 돔 03	*********	*****	****
137	회화 어안 01	*********	*****	****
138	회화 어안 02	*********	*****	****
139	회화 어안 03	*********	*****	****
140	회화 어안 04	*********	*****	****

붙임1. 북서울미술관 CCTV 현황 현황