문서번호	미래공간기획담당관-2094
결재일자	2024. 2. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공공건축2팀장	미래공간기획담당관
유연경		임종현	02/26
			김창규
협조
	일상감사팀장		이수연

「시청역 지하공간 기본구상」

제안서 평가위원회 구성 및 운영계획

2024.  2.

미래공간기획관

(미래공간기획담당관)

「시청역 지하공간 기본구상」

제안서 평가위원회 구성 및 운영계획

제안 내용의 객관적이고 공정한 평가를 위해 관련 분야 전문가로 구성된 제안서 평가위원회를 구성 및 운영하고 협상대상자를 선정하고자 함

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 시청역 지하공간 기본구상 용역

ㅇ 용역기간 : 착수일로부터 ’25.6.30.까지(15개월)

ㅇ 용역금액 : 금200,000천원(부가세 포함)

ㅇ 주요 과업내용

- 대상지에 대한 물리적·구조적 기초현황 조사·분석, 관련 법규·규정 검토

- 외부 연계(서울광장, 인근 건물 지하 1층)를 고려한 관련 사항 검토

- 시청역 지하공간 활용을 위한 전문가 공모 추진을 위한 기술 지원

- 지하철역사 상시이용 기준에 맞는 시설(건축/기계/전기/구조 등) 구축 계획

- 시설 구축 개략 사업비(공사비) 산정 및 사업계획(소요일정) 제시

- 지하철역사 혁신 프로젝트 확대 및 정착을 위한 정책 방향 제시 지원

□ 추진경위

ㅇ ’23. 9.~10.	시청역 숨은 공간 아이디어 공모 및 시민탐험대 운영

ㅇ ’23. 9.27.	’24년도 미래공간기획관 용역(사업) 추진계획 수립

ㅇ ’23.10.20.	기술용역 타당성심사(심사결과: 적정)

ㅇ ’23.10.31.	시장보고(시청역 시민탐험대 결과 및 단계적 추진 방안 보고)

ㅇ ’24. 1. 5.	시청역 지하공간 전문가 기술자문회의

ㅇ ’24. 1.24.	용역 시행계획 수립(미래공간기획담당과-823호)

ㅇ ’24. 1.29.	나라장터 사전규격 공개 실시(결과 : 제출의견 없음)

ㅇ ’24. 2. 6.	입찰 공고(2. 6. ~ 2. 27.)

ㅇ ’24. 2. 15.	제안서 평가위원 후보자 추천 요청

□ 제안서 평가 개요

ㅇ 평가기준 : 가격평가 10점, 기술평가 90점(정량적평가20+정성적평가70)

구 분		평 가 항 목		배점		비 고
계				100
기술 능력 평가 (90)	정 량 적 평가분야 (20)	사업 책임기술자 자격 및 경력상태		3	6	담당자 평 가
		분야별 책임기술자 자격 및 경력상태		3
		수행경험(실적)	실적건수	3	6
			실적금액	3
		입찰참가제한 업무정지		4	4
		재정상태 건실도	신용평가 등급	4	4
	정 성 적 평가분야 (70)	과업의 이해		10		평가 위원 평가
		시설 현황 조사 및 분석		10
		시청역 유휴공간 기본구상 전략		30
		지하철역사 혁신 사업화 방안 제시		10
		과업수행 계획		10
입찰가격평가(10)		가격평가 평점산식		10		평점산식적용

ㅇ 추진절차 및 방법

정량평가		정성평가		입찰가격		협상 및 계약
발주부서	+	제안서평가위원회	+	입찰산식	▶	합산점수 70점 이상인 자가 협상적격자
< 기술능력평가 >				<가격평가>

ㅇ 협상적격자 및 협상대상자 선정

- 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 추정금액(예정가격을 작성한 경우 예정가격)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외

- 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우 입찰 재공고를 할 수 있음

- 협상순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우 추첨에 의함

※ 협상적격자 : 협상대상자가 될 수 있는 자격을 갖춘 자

협상대상자 : 협상적격자로서 협상순위에 따라 서울시와 협상하는 자

□ 제안서 평가위원회 구성

ㅇ 평가위원 및 후보자 구성

- 평가위원회 구성 : 7인(건축 4인, 도시계획 2인, 토목 1인)

- 평가위원 후보자 구성 : 21인(건축 12인, 도시계획 6인, 토목 3인)

※ 공개 추천 및 개인 신청 / 분야별 구성인원의 3배수 이상

- 각 대학, 관련 협회 및 학회에서 추천한 전문가 등 평가위원 후보자를 선정하여 명부 작성 후 평가위원별 고유번호 부여

※ 평가위원 응모자격 : 서울특별시 제안서평가위원회 설치 운영에 관한 규칙 제2조

ㅇ 평가위원 선정 방법

- 제안서 제출자가 분야별 평가위원 수만큼 예비 명부의 고유번호를 추첨

- 분야별 빈도 순(동일한 경우 연장자 순)으로 참석여부 확인 및 선정

- 3차례 이상 연락이 안될 경우 차순위 다빈도 위원 연락

- 이해관계자 등 평가위원 제외 사유 확인 후 최종 확정

· 분야별 참석 가능 평가위원 선정이 어려울 경우 타분야 위원으로 대체 선정

□ 제안서 평가위원회 개최

************************************

**********************************

※ 일정 및 장소는 변동될 수 있으며, 단독입찰로 인한 계약 유찰 등 필요시 서면심사로 대체 가능(서울특별시 제안서 평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙 제5조 제6항)

ㅇ 발표 순서 : 당일 제안서 제출 업체가 추첨하여 결정

ㅇ 평가 방법 : 평가위원회 종합평가를 거쳐 우선 협상적격자 선정

ㅇ 평가위원별 역할 및 구성

- 위 원 장 : 위원회를 대표하고 위원회 운영 및 평가 총괄

※ 위원장은 위원 중에서 호선으로 결정하며, 평가에 참여함

- 평가위원 : 제안서 평가(평가항목별 종합평가), 입찰 참가업체 보충질문 수행

ㅇ 진행 순서(안)

구 분		내 용 (*입찰참가업체수에 따라 변동가능)
1	**	********************** ****************************
2	********	**********
3	********	***********************
4	*********	**************************** *********
5	****	************
6	****	**************************

※ 지방계약법 시행령 수의계약에 대한 한시적 특례기간 연장

· 관련공문 : 행안부 회계제도과-3219(’23.12.26.)호 및 재무과-62082(’23.12.26.)호

· 적용사항 : 수의계약 1회 유찰시 재공고 없이도 수의계약 가능토록 절차 완화

· 특례기간 : (기존) ’23.12.31.까지 → (변경) ’24.6.30.까지

□ 소요예산

ㅇ 소요예산 : 총 1,700천원

**********************************************

*********************************************************

*****************

*****************************************************************************

□ 향후 추진일정

ㅇ ’24. 2.27.	입찰마감(제안서접수) 및 평가위원 후보 연락순서 선정

ㅇ ’24. 3. 4.	평가위원 연락 및 위원 확정, 정량적 평가 완료

ㅇ ’24. 3. 5.	제안서 평가위원회 개최

ㅇ ’24. 3. 7.	협상적격자 및 우선 협상대상자 통보

ㅇ ’24. 3월 중	용역 계약 및 착수

붙임  1. 제안서평가위원 후보자 구성 및 추첨 계획 1부.

2. 제안서 평가위원회 관련 서류 각 1부.  끝.