문서번호	치수과-1574
결재일자	2024. 2. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	02/27
			이유국
협 조

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  2.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 저수로 준설공사(2차) -

실정보고에 대한 검토 보고

「2023년 한강 취수장 주변 준설공사(2차)」관련 건설사업관리자 실정보고 사항(준설토 반출량 추가 및 사토장 변경)에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 저수로 준설공사(2차)

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 ~ 신곡수중보

ㅇ 공사기간 : '24. 1. 24. ~ '24. 5. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 6,155㎥, 반출 29,802.5톤

- 준설 : 서울마리나 4,700㎥, 잠실택시승강장 1,455㎥

- 반출 : 29,803톤

ㅇ 계약금액 : 709,675천원

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '24.  1. 24. : 계약 및 착수

ㅇ '24.  1 ~ 2 : 토석정보시스템 조회

ㅇ '24.  2. 15. : 대체 사토장 현장 확인

ㅇ '24.  2. 19. : 실정보고 제출(시공사→건설사업관리단)

ㅇ '23.  2. 19. : 실정보고 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

ㅇ (준설토 반출) '23년에 준설토 포함 반출

- '23년의 배정 예산 부족으로 준설토 15,872.5톤 추가 반출

* 야적량 : 45,675톤, 계약물량(2차) : 29,802.5톤

⇒ 우기전 준설토의 완전 반출을 위해 '23년에 운반하지 못한 물량을 금차 공사에 포함하여 반출 조치

‣ 개략 공사비 : 증) 278,960천원

‣ 준설토 반출량 : 증) 15,872.5톤(당초 29,802.5톤 → 변경 45,675톤)

ㅇ (사토장 변경) 기존 설계 사토장 매립 완료에 따른 사토장 변경

- 건조된 준설토를 파주시 율곡리 일원(계약 운반 거리 L=49.395km)으로 반출토록 계획하였으나, 매립 완료로 준설토 반입 불가

- 토석정보시스템 조회 결과, 시기 불일치 및 준설토 사용 부적합 등으로 개인 사토장으로 변경 필요

구 분	타 현장 반입	반입완료	시기 불일치	사용 부적합
순성토 현장(26개소)	1개소	4개소	17개소	4개소

⇒ 홍수기 전 반출 완료해야 하는 현장 특성을 감안하여 준설토 적기 반입이 가능한 개인 사토장으로 변경 조치

‣ 다만, 개인 사토장으로 운반거리가 증가(평균 약 10km)함에도 불구하고 계약상대자와 협의, 계약된 운반거리 단가 적용

구 분	운반거리(km)	수량(톤)		증·감		비 고
		당초	변경
파주시 율곡리 일원	49.39	45,675	-	감)	45,675
파주시 군내면 정자리 418-1	53.80	-	15,675	증)	15,675	개인사토장
파주시 적성면 가월리 750	66.42	-	15,000	증)	15,000	개인사토장
파주시 파평면 덕천리 15-4	62.77	-	15,000	증)	15,000	개인사토장

ㅇ 공사비 증·감 현황                                     (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․ 감		비 고
사토운반공	370,623,890	568,014,300	증)	197,390,410
부대공	23,398,970	32,936,722	증)	9,537,752
제경비	137,617,140	209,648,978	증)	72,031,838
도 급 비	531,640,000	810,600,000	증)	278,960,000

□ 조치계획

ㅇ 홍수기 전 준설토 반출 완료를 위해 건설사업관리단 검토의견을 반영하여 우선 작업지시

- 반출량 : 45,675톤

- 사토장 : 파주시 군내면 정자리 418-1 외 2개소

ㅇ 준설토 추가 반출에 따른 소요예산은 사업계획 조정 및 '24년 예산(시비) 사용

- 공사 시급성을 감안하여 수상시설 주변 준설(6,155㎥)은 금차 공사에 제외

※ 하반기 준설공사에 포함하여 시행 예정

□ 행정사항

ㅇ 작업지시 통보(치수과 → 건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.