아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	2023년 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 건설사업관리단
(경유)
제목	사토량 및 사토장 변경 실정보고 승인 알림 (2023년 한강 저수로 준설공사-2차)

1. 이준한강 2024-05호(2024.02.19)와 관련입니다.

2. 사토량 및 사토장 변경 실정보고 사항에 대하여 아래와 같이 승인함을 알려드리니 안전 관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 공사 완료 후 수량 산출근거 및 공사 전, 중, 후 사진을 첨부하여 완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 준설토 반출량 변동시 반드시 사전보고 후 작업 시행하여 주시기 바라며 추후 설계변경시 물량 증‧감 사항을 반영 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 실정보고 승인 내역(※ 상호 협의 결과에 따라 신규비목(운반비) 계약단가 적용)

구 분	운반거리(km)	수량(톤)		증·감		비 고
		당초	변경
파주시 율곡리 일원	49.39	29,802.5	-	감)	29,802.5
파주시 군내면 정자리 418-1	53.80	-	15,675	증)	15,675	개인사토장
파주시 적성면 가월리 750	66.42	-	15,000	증)	15,000	개인사토장
파주시 파평면 덕천리 15-4	62.77	-	15,000	증)	15,000	개인사토장

끝.

	서울특별시미래한강본부장
주무관	박지수		치수과장	02/27
김창신
협조자
시행	치수과-1578	(	2024. 2. 27.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0696	/전송	02-3780-0744	/	cp8203@seoul.go.kr	/	부분공개(5)