문서번호	시설관리과-3228
결재일자	2024. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정지덕		차승환	02/28
			조임남
협 조

공사기한 연기 검토보고

2023년-2차 동작 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

2024. 2.

남부수도사업소

[시설관리과]

공사기한 연기 검토보고

<2023년-2차 동작 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사>

본 공사「2023년-2차 동작,영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속) 」감독 업무 수행중 준공기한 연기 사유가 발생되어 보고합니다.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2023년-2차 동작 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

❍ 공사개요 : ***********************

❍ 공사기간 : 2023. 11. 20. ~ 2024. 6. 30.

❍ 계약금액 : *************

❍ 시 공 사 : ****************

□ 보고사항

❍ 공사연기 내역

연번	위 치	지시내용	연기사유	비고
1-2	신길동 235-59	변실정비	경찰서 굴착 협의중
1-3	신길동 235-59	변실인상	경찰서 굴착 협의중
1-5	양평동4가 70	변실정비	상가입구로 굴착 협의중
1-6	양평동1가 164-22	변실정비	경찰서 굴착 협의중
1-7	영등포동2가 428	변실정비	시장으로 상인회와 협의중
1-8	영등포동2가 31-9	변실정비	시장으로 상인회와 협의중
1-9	영등포동2가 33-9	변실정비	시장으로 상인회와 협의중
1-12	영등포본동 618-496	변실정비	롯데백화점 입구로 굴착 협의중

□ 조치의견

❍ 상기와 같은 사유로 시설물 설치 및 보수공사가 기한 내 불가함에 따라 공사 기한을 연기 조치하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

❍ **********************

❍ 공사기한 변경

- 당초 : 2023. 12. 4. ~ 2024. 2. 29.

- 변경 : 2023. 12. 4. ~ 2024. 3. 31.

붙임  공사연기원 1부.  끝.