문서번호	건축부-3286
결재일자	2024. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화시설과장	건축부장
박영우	김선경	02/28
		소영수

『서울 어울림체육센터 건립공사』 철근이음 커플러 반영 실정보고

『서울 어울림체육센터 건립공사』

철근이음 커플러 반영 실정보고

2024.  2. 27. (화)

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

철근이음 커플러 반영 실정보고

철근이음 커플러 반영 실정보고가 책임건설사업관리기술인으로부터 제출되어 적정 여부를 검토하여 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡
(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

*********************************************

ㅇ 공사기간: ’22. 7. 25. ~ ’25. 7. 7.(36개월)
(2차: ’23. 9. 18. ~ ’24. 3. 31.)

ㅇ 시 공 사: ㈜코원건설 외 1개사(건축, 토목, 조경)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 률: 32.4%

□ 추진경위

ㅇ ’19. 12. ~ ’21. 5.   : 설계용역 실시

ㅇ ’22. 07. 29.   : 공사 계약

ㅇ ’22. 07. 25.   : 공사 착공 (건축, 토목, 조경)

ㅇ ’22. 08. 23.   : 착공식

ㅇ ’23. 09. 18.   : 1차수 공사 완료

ㅇ ’24. 02. 현재  : 버림기초콘크리트 타설중

□ 실정보고 내용

ㅇ 관련근거 등

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 계약일반조건 제6절(공사설계 변경)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 구조 실시설계도면 구조일반사항 1.(S-011) 1.4 기계식이음 일반사항

- 자인 DVA-*******1 서울 어울림체육센터 철근이음 부위 기계식 이음 적용 검토

- 코원어울림-제2024-02-15호 실정보고 철근이음 커플러 반영요청

ㅇ 변경사유

- 가시설 해체 후 토압을 받기 위하여 띠장하부 850mm까지 벽체 타설시,
철근이음길이 확보가 불가능하여, 이음방법을 기계식이음으로 변경필요

ㅇ 변경 내용

- 이음길이 확보 불가능한 D19~29에 대해 기계식이음인 나사식 커플러로 변경

ㅇ 공사비 변경 검토

****	****	****	*******	**
*****	**************	**************	**********************	******
*****	************	************	***********************
****	**************	**************	***********************
*****	************	************	**********************
***	**************	**************	**********************
*****	**************	**************	**********************
********	**************	**************	**********************

*****************

*************************************************************************************

□ 적정여부 검토

ㅇ 설계변경 대상이며, 원활한 공정관리를 위하여 선시공 후, 관련 절차 이행시 최종 공사물량 및 금액을 확정하고자 함

붙임: 철근이음 커플러 반영 실정보고 1부.  끝.