문서번호	기획관리과-2493
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
문평현		조윤홍	03/04
			임승철
협조

『서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사』

설계변경 검토보고

2024. 2.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사』

설계변경 검토보고

우리센터에서 시행중인『서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사』관련,  시공사 및 감리단에서 제출된 설계변경 요청에 대한 검토보고를 드림

▸ 검토내용 : 케이블 규격 및 수량 변경, UPS 축전지 철거작업 반영

▸***************************************************************

Ⅰ		공사개요

❍ 위    치 : 서울시 데이터센터 내

❍ 공사기간 : 2023. 9. 28. ~ 2024. 3. 31.

❍ 총공사비 : ************

❍ 규    모 : 케이블 철거(294m), 케이블 설치(1466m), 축전지 철거(918cell)

❍ 공사내용 : 케이블 철거 설치, UPS 축전지 철거 외

❍ 시 공 사 : ***************************

❍ 공 정 률 : 100%

케이블 설치	케이블 포설

□ 실정보고 사항 검토보고(*********************************

❍ 시공사 실정보고 사항 검토 승인

-***********************************************************

Ⅲ		검토내용

□ 설계변경 내용 요약

❍ 실정보고 승인사항 반영

연번	변경내용	증·감(천원)	승인문서	비고
*	******************	********	************************
*	*************	*******
*	**************	*******
*	********	*******
****		********	*************

□ 공사비 변동내용

❍ 도급공사비 증감현황 : 증 **********원 (단위: 원)

비 목		구 분	변경전 금액	변경후 금액	증.감
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비	**********	**********	**********
		간 접 재 료 비	**	**	**
		작업설.부산물등	*	*	*
		소 계	**********	**********	*********
	노무비	직 접 노 무 비	**********	**********	**********
		간 접 노 무 비	*********	*********	*********
		소 계	**********	**********	**********
	경비	산 출 경 비	*	*********	*********
		산 재 보 험 료	*********	*********	*******
		고 용 보 험 료	*******	*******	*******
		건 강 보 험 료	*********	*********	*
		연 금 보 험 료	*********	*********	*
		퇴직공제부금비	*********	*	**********
		안 전 관 리 비	*********	*********	*
		기 타 경 비	*********	*********	*********
		노인장기요양보험	*******	*******	*
		하도급보증수수료	*	*	*
		소 계	**********	**********	*********
소 계			***********	***********	**********
일 반 관 리 비			*********	**********	*********
이 윤			**********	**********	*********
전자인력관리시스템 단말기			*********	*	**********
고용개선지원비 합계(PS단가)			*********	*	**********
기타(폐기물처리비 등)			**********	**********	**********
공 급 가 액			***********	***********	**********
부 가 가 치 세			**********	**********	*********
도 급 비			***********	***********	**********

Ⅳ		검토의견 및 향후계획

□ 감리단 검토의견

❍ 시공사가 제출한 실정보고서 내용을 검토한 결과, 설계기준 및 기타 여건이 제반 규정에 적합하게 작성 된 것으로 사료됨

□ 보고자 의견

단위사업	통계목	세부사업	품의액	비고
청사유지관리	시설비	데이터센터 청사시설 유지관리 (항온항습기 교체설치 )	18,794,150	공사 증액분

❍ 검리단의 검토의견서와 같이 시공사가 제출한 실정보고서 승인사항을 반영한 설계변경 건으로 계약변경을 진행하는 것이 타당하다고 사료되며,

❍ 금회 설계변경된 금액으로 공사계약 예정임

❍ 금번 공사는 불가피하게 사고이월된바, 설계변경된 금액을 충당하지 못하여, 증액된 만큼 동 통계목 당해예산에서 지출하고자 함.

□ 향후 계획

❍ `24.03. : 계약변경 의뢰

❍ `24.03. : 공사 준공

붙 임 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.