아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(내부순환로(월곡IC)구조개선공사 공정관리 철저 요청)

1.업무지시현장 : 내부순환로(월곡 IC) 구조개선공사 주식회사 삼안, 내부순환로(월곡I

C) 구조개선공사 주식회사 유신, 내부순환로(월곡 IC) 구조개선공사

큰빛종합건설 주식회사

2.작 성 일 자 : 2024-03-04 09:03:15

3.지 시 내 용

가. 토목부-3474(2024.02.20.)호와 관련입니다.

나.「내부순환로(월곡IC)구조개선공사」의 구조물 상부 공사, 정릉천 정비, 환경 개선공사 등 개통('24.05.) 및 준공('24.06.)을 위해서는 철저한 안전 및 공정관리가 필요한 사항으로 2023년도 사고이월 예산(57억) 및 2024년도 본예산(17억)에 대해 예산 집행이 우려되는 실정으로,

다. 시공사 및 건설사업관리단에서는 안전 및 공정관리를 철저히 하여 공기 내에 원활한 사업이 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바라며, 계약기간 내에 이행이 되지 않을 경우 지체상금이 부과 될 수 있음을 알려드립니다.

라. 아울러, 개통 전 세부예정공정표를 제출 요청하였으나 현재까지 회신이 없어 재요청드리며, 지연된 공정이 발생 할 경우 만회대책 및 만회공정표를 수립하여 공사의 이행상태를 점검하고 미흡한 내용에 대한 필요대책 등을 수립하여 추진하여 주시기 바랍니다.  끝

주무관	황태선		도시고속도로과장	03/04
이상욱
협조자	주무관	이재천		주무관	장종주
시행	토목부-4261	(	2024. 3. 4.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 토목부 도시고속도로과	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2164	/전송	02-6438-2199	/	gogyp1h@seoul.go.kr	/	부분공개(5)