문서번호	소방행정과-2398
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

				시 민
소방위	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김석기	고주석	손문범		03/04
				박정경
협 조
	재난관리과장		차근철
	현장대응단장		신윤환
	119안전센터장		김희철

우이119안전센터 임시차고지 설치 추진 계획

2024. 03.

강 북 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

강북소방서 우이119안전센터 임시차고지 설치 계획

강북소방서 우이119안전센터에 증차된 구급차량의 출동대기 및 소방차량 관리를 위한 임시차고지를 조성 하고자 함

1		추진근거

○ 소방행정과-152(2024.1.3.)호 「구급차 미아센터(2소대)에서 우이센터로 재배치 운영 계획 보고」

○ 본부 소방행정과-33951(2023.12.20.)호 「2024년 상반기 소방관서 조직 및 정원 조정계획 알림」

○ 본부 소방행정과-5192(2024.02.26.)호 「소방관서 시설물 유지보수  "긴급보수 예산" 재배정 알림」

2		추진배경

○ 우이119안전센터는 1984년도에 준공 2024년 현재 40년 된 노후 된 건물이자,

2023년 기준 서울시 구급분야 최다 출동회수를 기록 함으로써, 소방(구급)서비스

환경의 원할한 제공을 위해, 구급대 1개대를 추가로 증원(차) 함

○ 이에 구급차량의 차고지가 별도로 없어, 서울시(우이센터) 부지내 임시차고지를

설치하고자

○ 강북구청 도로관리과, 건축과 및 북부수도사업소 등 각 기관별 협의를

통해 임시차고지 설치를 위한 환경 조성 및 예산 재배정.

3		사업개요

가. 사 업 명: 우이119안전센터 임시차고지 설치

나. 추진기간: 2024. 03. 04.~ 03.29 (26일간)

다. 위치/규모: 강북구 삼각산로 111, 본건물 좌측면 대지 36㎡

라. 예    산: ************************--<시설비>

마. 개선사항

- 도면

조성 예정지	차고지 조성안

- 세부일정

1) 강북소방서 대응총괄팀 부지내 소화전 이전설치(북부수도사업소 시공)

- 2024. 02. 26.(월)

2) 임시차고지 조성을 위한 계약(수의) 2024.03.06. 예정

3) 건설교통국 도로관리과 보행환경개선팀 : 보도부분 시공

- 구급차량의 원할한 진출입이 가능한 경계턱 조성(3월 중순경)

4) 임시차고지 바닥조성 및 가설건축물 축조신고

- 도로관리과 공사일정협의에 따른 일정조정 및 강북구청 축조신고

5) 준공에 따른 검사검수(3월 26일한)

※ 상기 일정은 업무사정에 따라 변동가능

7		기 대 효 과

○ 출동시 전면주차후 후진출동 등 위험한 출동환경 개선

○ 외부 기후환경(비, 눈)에 따른 소방차량 관리 및 차량 정비환경 개선

○ 신속한 출동을 통한 적극적 소방(구급)서비스 제공

붙임  우이119안전센터 임시차고지 조성 공사원가계산서 1부.  끝.