문서번호	급수운영과-4355
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
이준범	代정석균	03/05
		신근호
협 조

「대현산 배수지(1-1지)내부방식공사」

공사현장 실정 검토 보고(1회)

2024. 3.

동부수도사업소

(급수운영과)

「대현산 배수지(1-1지)내부방식공사」

공사현장 실정 검토 보고

우리사업소에서 시행중인「대현산배수지(1-1지)내부방식공사」의 감독기관 서울시설공단에서 제출된 현장 실정보고서를 검토 후 보고 드림.

□ 관련근거

○ 공사감독2처-1431(2024.3.4.)호 현장실정 검토보고서 제출(1회)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 대현산배수지(1-1지)내부방식공사

○ 공사기간: 2023. 9. 13.∼2024. 6. 30.

○ 도 급 비: ***********

○ 공사개요: *************************************************************

○ 계 약 자: 비성건설(주) 대표 남학진

□ 보고내용

○ 지상 환기구(1개소)보호 가림막 해체 및 임시가설칸막이 신설**********

- 실정보고 사유

· 배수지 작업용 가설자재 반출입, ****** 등 을 위한 기존 환기구 이용

· 공사자재 반입 및 ********** 기존 환기구 가림막 해체 필요

*****************************

· 기존 환기구 작업 해체 작업후 공원내 시민안전을 위한 안전시설물 설치 필요

[가설물 설치: 샌드위치 판넬 및 출입문]

기존 보호 가림막	기존 보호가림막 철거후 가설패널설치

- 시설공단 검토 의견

· 가설자재 입출고 및 ****** 등을 위한 기존 환기구 보호 가림막 철거가 불가피한 실정이며,

· 공사기간동안 시민안전 및 작업자의 원활한 작업추진을 위해 가설패드(샌드위치 패널 및 출입문) 설치함이 타당함

○ 임시전력케이블 설치***********

- 실정보고 사유

· 배수지 내부 방식공사를 위한 임시가설전기 필요

*********	***********	***********	*********

- 시설공단 검토 의견

· 배수지 작업을 위해 설계미반영된 임시전력케이블 설치는 타당하며,

**********************************************************************************

※ 임시전력 케이블 철거비용 미반영: 추후 타항 공사시 사용(예산절감)

□ 발주처 검토 의견

○ 감독자 검토의견과 같이 공사시 필요한 자재 입출고, ******을 위한 환기구 보호가림막 철거는 불가피하며, 시민안전 및 원활한 작업추진을 위한 가설패널 설치는 타당하고,

○ 공사시 필요한 임시가설전력케이블 설치는 필요함

□ 조치계획

○ 위 보고내용을 감독기관인 서울시설공단 및 계약업체인 비성건설(주)에 통보(승인)하고 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  1. 현장실정 검토보고(시설공단) 1부.

2. 실정보고서(시공사) 1부.  끝.