문서번호	시설관리과-1792
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
임무환		소영신	03/04
			이유국
협 조
	총무과장			김영창
	기획예산과장			이강수
	주무관			강혜민

『안양천교 자전거도로 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(ES-1회)

2024.  3.

미래한강본부

[시설관리과]

『안양천교 자전거도로 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(ES-1회)

『안양천교 자전거도로 구조개선공사 건설사업관리용역』추진 중 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청에 따라,  지방자치단체 용역계약 일반조건 제6절 2에 의거 설계변경(계약금액 조정)을 시행하고자 함.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 안양천교 자전거도로 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 (장기계속)

○ 현장위치 : 한강공원 일원

○ 과업기간 : 2023. 10. 10. ~ 2026. 3. 9.(1차: '23.10.10.~'24. 3. 5)

○ 공사규모

- 교량 신설(B=9.5m,L=180m ), 기존 교량 철거(B=6.0m,L=229m), 물막이공(L=180m), 조경 및 기타 부대시설 1식.

○ 총 용역비: 1,412,000,000원 (1차계약: 300,000,000원)

○ 용 역 사 : 주식회사 천일 외2개사

□ 설계변경 개요

○ 관련근거: 지방계약법 시행령73조, 동법 시행규칙 제72조와 지방자치단체 용역계약 일반조건 제6절 2(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

○ 변경사유: 도급자 (주)천일에서 물가변동(품목조정률3% 이상)에 따른 계약금액조정(조정률:3.73%)청구

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
전체분-1차	1,412,000,000	1,455,421,000	증	43,421,000
1차분-정산	300,000,000	301,521,000	증	1,521,000

□ 조치계획

○ 지방자치단체 용역계약 일반조건(계약법 시행령 제73조①항)에 따라 품목조정률 3%이상(3.73%) 상승 및 도급업체(주식회사 천일)의 계약금액 조정 신청사항 검토 및 설계변경 시행.

붙 임: 1. 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토의견서(건설사업관리책임기술인) 1부.

2. 물가변동에 따른 계약금액조정신청(산출내역) 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 설계변경내역서(전체분-1차) 1부.

5. 설계변경내역서(1차분-정산) 1부

6. 합의각서 1부. 끝.