문서번호	건축부-3684
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설계과장	건축부장
오종근		홍순명	03/06
			소영수
협 조
	주무관			하성현
	주무관			김민지

잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사

설계 기준좌표 현장상이에 따른 실정보고 검토보고

2024.  3.

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사

설계 기준좌표 현장상이에 따른 실정보고 검토보고

건축부장 :소영수☎6438-2208 건축설계과장 : 홍순명☎2270 담당 : 오종근☎2271

□ 사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사

ㅇ 위    치 : 송파구 잠실동 10번지 일원

ㅇ 사업시행자 : 현대자동차(주)외 2개사

ㅇ 사업면적 : 458,806㎡ 중 공공영역 158,657.4㎡

ㅇ 공사규모 : 지하4층/지상3층, 연면적 195,599.427㎡

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 30.~ '26. 12. ※설계완료: ’23.07.31.

ㅇ 총사업비 :****************************

-********************************************************

ㅇ 시공사(현대건설), 감리사(펨코엔지니어링외4), 설계사(나우동인건축사사무소외2개사)

□ 추 진 경 위

ㅇ ’17.  7.     :「올림픽 주경기장 리모델링 기본계획」수립(동남권사업과)

ㅇ ’18. 12.     :「잠실 학생체육관 이전 신축 기본계획」수립(동남권사업과)

ㅇ ’21.  4. 26 : 기본설계완료 통보(동남권사업과→도기본)

ㅇ ’21.  8. 23 : 건설사업관리용역 착수(도기본)

ㅇ ’22.  6. 10 : 기본설계 확정도서 송부(동남권추진단→도기본)

ㅇ ’23.  7. 31 : 민간사업자와 협의된 최종 실시설계도서 제출(도기본→동남권추진단)

ㅇ ’23.  8. 24 : 도시계획시설(체육시설)사업 세부시설 조성계획 경미한 변경 및 실시계획변경 인가 고시

ㅇ ’23.  8. 30 : 착공신고(현대자동차외 2개사)

ㅇ ’24.  3월현재 : 주경기장 주변 구조물(데크) 철거중(공정률2.4%)

□ 설계 기준점 좌표 현장상이 실정보고 현황

ㅇ 설계좌표와 현장 실측좌표 오차 현황

구분	설계	실측	오차	비고
X좌표	***********	***********	*****	**** *****
Y좌표	***********	***********	*****

*

ㅇ 주요 변경내용

구분(공공영역)	당초	변경	증감	비고
대지면적	**********	**********	**
건축면적	*********	*********	*******
연 면 적	**********	**********	******

ㅇ 설계도서 수정 및 인.허가 사항

***************************

*****************************

********************************************************

**************************************************************

*********************************************

*********************************************************

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

*****************************************************

******************************************************************************************************

□ 처리 의견

ㅇ 건설사업관리단 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단되어, *****************************************하고,

ㅇ 사업시행자(현대자동차)가 ********************************* 동남권사업과, CM단 등 사업관계자와 적극 협의하여 공사일정에 차질이 없도록 하고자 합니다.

첨부  1. 주요 설계수정 사항 1부.

2. 건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.