문서번호	정수시설과-2654
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정연준		代전준원	03/06
			전종원
협 조
	주무관			박상현
	주무관			박성택

2021년 영등포아리수정수센터

취정수장 정밀안전진단용역 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 영등포아리수정수센터

취정수장 정밀안전진단용역 조치결과 보고

소장:전종원☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 :정연준☎5673

우리 정수센터 시설물에 대한 2021년 정밀안전진단 용역 후 조치 현황에 대해 보고 드림

Ⅰ		개 요

□ 용역현황

ㅇ 용 역 명 : 2021년 영등포아리수정수센터 시설물 정밀안전진단용역

ㅇ 용역기간 : 2021. 2. 15. ~ 12. 31.

ㅇ 용역금액 : 200,000천원

ㅇ 용역업체 : 반석안전, 대한산업안전협회

※ 용역발주 : 본부 생산관리과

□ 대상 시설물

ㅇ 정수시설

구 분		위 치	설치년도	규 모	비고
정수장	1정수장	영등포구 노들로11	1992	Q=30만㎥/일
	2정수장		2010	Q=30만㎥/일
취수장	풍납	송파구 올림픽로41길108	1992	Q=70만㎥/일
건축	정수장	영등포구 노들로11	1992,2010	42,847㎡
	취수장	송파구 올림픽로41길108	1992	2,662㎡

ㅇ 관 로

구 분	구 경	연 장	비 고
도송수 및 구내관로	D=1,650~2,400mm	L=2,643m
고도관로	D=200~1,800mm	L=1,607m
공업용수	D=600~800mm	L=468m
계	D=200~2,400mm	L=4,718m

□ 점검(진단) 실시현황

년도	점검종류	대상시설물	점검(진단)기관	용역결과	비고
2023	정밀안전점검	1․2정수장,풍납취수장	한국건설방재연구원	B
2021	정밀안전진단	1․2정수장,풍납취수장	반석안전,대한산업안전협회	B
2019	정밀안전점검	1정수장,풍납취수장	중앙종합안전기술연구원	B
2018	정밀안전점검	2정수장	대한산업안전협회	A
2017	정밀안전진단	1정수장,풍납취수장	한국시설안전연구원 한국국토안전연구원	B

Ⅱ		보수·보강 조치 결과

□ 조치내용

ㅇ 정밀안전진단결과  우선순위 1순위에 대해 우선 보수·보강 실시

ㅇ 대상물량 및 작업여건 등을 고려하여 년도별 계획에 따라 보수·보강 시행

□ 조치현황

건수 년도	계		풍납취수장		1정수장		2정수장		비고
	완료	대상	완료	대상	완료	대상	완료	대상
계	363	6,662	96	518	132	3,237	135	2,907
2022	228	228	96	96	132	132	-	-
2023	135	135	-	-	-	-	135	135
2024	-	498	-	27	-	251	-	220
2025	-	5,801	-	395	-	2,854	-	2,552

ㅇ '22~'23년 계획 물량에 대해 보수·보강 모두 완료

ㅇ 예산이 확정된 '24년은 예산액 범위 내에서 보수·보강하고, '24년이후 잔여물량은 우선 순위별 단위사업 및 시설물 유지보수공사 예산 반영하여 보수·보강 조치

□ 향후계획

ㅇ 잔여물량중 '24년은 우선순위 1순위 위주 보수·보강 정비 시행하고 2·3순위는 '25년 정비

※ 보수·보강과 연관된 타작업(항청소)일정,작업여건 등에 따라 계획변경 가능

Ⅲ		행정사항

□ 보수·보강 조치 사항을 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 입력하여 체계적인 관리

붙임 : 1. 시설별 보수․보강 물량표 1부.  끝.