문서번호	박물관과-2617
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		미술관조성팀장	박물관과장
박재웅		김종오	03/06
			배희정
협 조

서울사진미술관 인테리어(공간디자인) 설계 용역

계 약 변 경  검 토 보 고

2024. 3.

문 화 본 부

(박물관과)

서울사진미술관 인테리어(공간디자인) 설계 용역

계 약 변 경  검 토 보 고

우리부서에서 추진중인 위 용역과 관련하여 수장고 조성 과업내용 추가에 따른 계약 변경에 대해 검토 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 서울사진미술관 건립 기본구상 계획 (박물관진흥과-6578, 2016.07.14.)

ㅇ 서울사진미술관 건립 세부추진계획 (박물관과-21873, 2022.05.10.)

ㅇ 서울사진미술관 인테리어(공간디자인) 설계용역 추진계획 (박물관과-4108, 2022.12.09.)

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 (행정안전부 예규 제252호, 2023.06.29.)

- 제9장 계약 일반조건, 제7절 계약금액의 조정

□ 추진경위

***********************************

***********************************

***************************************************

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 서울사진미술관 인테리어(공간디자인) 설계 용역

******************

******************************************

*************************************

ㅇ 과업내용

- 오리엔테이션존 및 연구·교육·사무실 등 건물 지하/지상 공간별 세부 디자인 계획

- 사업 범위 내 적합한 맞춤형 가구 설계 등

□ 계약 변경 내역

ㅇ 변경 내역

***	***	***	***
****	************************	************************	*******
*****	********	*********	************

ㅇ 변경 사유

- ****************

**************************************************************

ㅇ 용역비 산출근거

- *******************************************************************

□ 조치계획

ㅇ ********************************************************************

□ 향후계획

ㅇ ’24. 3. 계약변경 의뢰 (→재무과)

ㅇ ’24. 4. 용역 준공

붙임 : 1. 합의각서 1부

2. 설계업무 대가산출서 1부.  끝.