문서번호	시설보수과-1023
결재일자	2024. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		시설보수과장	난지물재생센터소장
김도형		장태옥	03/08
			이문주
협 조
	관리과장			김영진
	운영과장			한차순

총인처리시설 인수 TF팀 구성 및 운영 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3. 8.

난지물재생센터

(시설보수과)

총인처리시설

인수 TF팀 구성 및 운영 계획

도시기반시설본부에서 시공 중인 총인처리시설 준공('24.5)이 다가옴에 따라 TF팀을 구성·운영하여 원활한 인수·인계를 추진하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

□ 공사위치 : 고양시 덕양구 대덕로 426(난지물재생센터 내)

********************************************

******************

***************************

*********************

****************************************

*******

******************************************

**********************************************

□ 공사내용

ㅇ 총인 처리수와 비총인 방류수를 혼합하여 방류(690,000㎡/일)

ㅇ 혼합 방류수 T-P 0.5㎎/L 이하 유지

- 신설 : 총인처리시설 처리수 439,000㎡/일(T-P 0.12㎎/L)

- 기존 : 비 총인 방류수 250,800㎡/일(T-P 1.15㎎/L)

Ⅱ		추진경위

*******************************

**************************

**************************************

********************************

**************************

***********************

***************************************

******************************************

*******************************

Ⅲ		TF팀 운영

□ 구성 및 업무(총 10명)

구분		업무범위	담당자
시설 보수과	기계	- TF팀 운영 총괄 - 준공 도면과 시공상태 일치 여부 확인 - 배관설치 상태 및 기계설비 정상 가동여부 확인 - 현장 미비사항 발굴 및 보완 요청	***
	전기	- 전기분야 인허가 서류 확인 - 준공 도면과 시공상태 일치 여부 확인 - 전기시설물 시공상태 확인 - 현장 미비사항 보완 요청	***
	통신/ 소방	- 통신/소방분야 인허가 서류 확인 - 준공 도면과 시공상태 일치 여부 확인 - 통신/소방시설물 시공상태 확인 - 현장 미비사항 보완 요청	***
	토목	- 토목분야 인허가 서류 확인 - 준공 도면과 시공상태 일치 여부 확인 - 그외 토목시설물에 대한 제반 사항 - 현장 미비사항 보완 요청	**
	건축	- 건축분야 인허가 서류 확인 - 준공 도면과 시공상태 일치 여부 확인 - 그외 건축시설물에 관한 제반 사항 - 현장 미비사항 보완 요청	***
	조경	- 조경분야 인허가 서류 확인 - 준공 도면과 시공상태 일치 여부 확인 - 그외 조경시설물에 관한 제반 사항 - 현장 미비사항 보완 요청	***
운영과	공정, 운영	- 종합시운전 결과 성능보증 여부 확인 - 총인처리시설 공정 정상 운영에 관한 사항 - 운영요원 교육훈련 계획 확인	***
	중앙제어실	- 감시 및 제어시스템에 대한 제반 사항 - 미비사항 보완 요청	***
	농축,탈수기	- 농축, 탈수설비 성능보증 여부 확인 - 농축, 탈수설비에 대한 제반 사항 - 미비사항 보완 요청	***
	탈취기	- 탈취기 성능보증 여부 확인 - 탈취기, 탈취배관에 대한 제반 사항 - 미비사항 보완 요청	***

□ 운영계획

ㅇ 운영기간 : '24.3.12. ∼ 인수·인계 시 까지

ㅇ 정기회의 : 매주 화요일 09:30, 소회의실

※ 현안사안 발생 시 임시 회의 운영(참석대상은 현안 관련자로 국한)

ㅇ 운영방법

- 담당자별로 사전 확인한 미비사항을 공유

- 수집된 의견에 대한 논의 및 적정성 여부 검토

- 선정된 안건에 대하여 주관부서(도시기반시설본부)에 보완 요청

- 보완 요청사항에 대한 지속적 관리 및 인수인계 시 확인

Ⅳ		향후일정

□ '24. 3. 11. : 총인처리시설 예비준공검사(도시기반시설본부)

□ '24. 4. 30. : 종합시운전 종료

□ '24. 5. 10. : 공사 준공

□ '24. 6월 중 : 총인처리시설 인수·인계 추진.  끝.