아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공사 연기 승인 통보

1. 목양건설(주) 2023-018호(2024.3.7.)와 관련입니다.

2. 귀 사로부터 공사 연기 요청한 사항에 대하여 아래와 같이 공사 연기 승인 통보 하오니 작업기간 내 공사완료 하시고 완료 보고서를 우리사업소로 제출하시기 바랍니다.

가. 연기요청 사유 : 공사장 인근 병원과 공사일정 협의 과정에서 공사기한 연기

나. 공사 연기 승인 내역

작업지시번호	작업기간		비 고
	당초	변경
8차	'24.2.1~'24.3.8.	'24.3.9~'24.3.31.

마. 시공업체 :****************

바. 관리업체 : **************************

붙 임 : 공사연기요청서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	목양건설(주) 대표 김영권, (주)홍익기술단 대표 성낙전
주무관	노병권		급수운영팀장	정수용		급수운영과장	03/08
권오정
협조자
시행	급수운영과-3916	(	2024. 3. 8.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 서울특별시 강서수도사업소(급수운영과)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3956	/전송	02-3146-3989	/	qute9280@seoul.go.kr	/	부분공개(6)