문서번호	시설개선과-2425
결재일자	2024. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
최용준		03/11
		이균형
협조
	주무관		배성호

- 2024년 잠실야구장 환경개선공사 -  시공사 실정보고 검토 보고

2024. 3.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

- 2024년 잠실야구장 환경개선공사 -

시공사 실정보고 검토보고

"2024년 잠실야구장 환경개선공사" 와 관련 야구장 관리본부 요청 및

현장 여건에 대한 시공사로부터 실정보고 사항이 접수되어 검토한 후, 계약금액 조정계획에 대한 보고 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2024년 잠실야구장 환경개선공사

○ 공사개요

- 관람석 논슬립 도장 3,759㎡

- 외야석 통로 폴리우레아논슬립 904㎡

- 관리사무실 비상구(출입문) 설치 2개소

- 전광판 옥상 난간 보강 32m

- 전광판 픽셀룸 후면 난간 설치 72개소

- 조명타워 점검계단 안전가드 설치 20m

- 본부석 야구망(그물망) 교체 680㎡

- 외야석 남자화장실 소변기 칸막이 설치 20개소

○ 소요예산 : **************

○ 시 공 자 : ****************

○ 추진경위

- 2024. 1. 10. : 발주방침

- 2024. 1. 12. : 공사발주

- 2024. 1. 29. : 공사계약 및 착공

- 2024. 3.  7. : 잠실야구장 관리본부 의견 접수

- 2024. 3.  8. : 시공사 실정보고

□ 시공사 실정보고 내용 및 검토

○ 관리본부 요청사항[잠운본 제2024-10호(2024.3.7.)]

연번	내 용	사 유	현황사진	검토내용	비 고
1	외야석 1층 통로 출입구 계단 폴리우레아 논슬립 도장 추가	관람객 안전 확보		관람객 안전 확보를 위해 반영코자 함	* *******
2	내야 중앙석 구간 2층 내벽 수성페인트 재도장 추가	품질 향상		품질향상(접착력 확보)을 위해 반영코자 함	* *******
3	외야석 지붕 전면구간 수성페인트 재도장 추가	품질 향상		품질향상(접착력 확보)을 위해 반영코자 함	* *******

연번	내 용	사 유	현황사진	검토내용	비 고
4	외부 기둥 상부 수성페인트 재도장 추가	관람객 안전 확보		관람객 안전 확보를 위해 반영코자 함	* ********
5	홈, 원정 임원실 및 경기운영실 개선공사 추가	실사용자 의견 반영		사용자측 의견 반영코자 함	* *******
6	전광판, 조명탑 난간설치 및 안전가드 설치	크레인 및 고소작업차 수량 감소		품질향상을 위해 반영코자 함	* *******
계					* ******** **********************

□ 계약금액 조정

○ 총공사비 증․감 내역

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		*******	*******	******
도급비	공 급 가 액	*******	*******	******
	부가 가치세	******	******	*****
	계	*******	*******	******

□ 검토의견

○ 실정보고 내용 승인조치

- 관람객 안전확보 및 공사의 목적을 달성하고 품질향상을 위하여

승인조치하여 안전사고 방지 및 쾌적한 환경을 제공코자 함.

□ 조치의견

○ 위와 같이 시공사의 실정보고를 검토한 결과 타당하여 승인 조치하고, 추후 계약금액 조정에 반영코자 함.

○ 계약변경에 따른 추가 공사비는 본 예산의 낙찰차액을 활용하고자 함.

붙임  : 1. 야구장 관리본부 요청공문 1부

2. 시공사 실정보고서 1부

3. 변경내역서 1부.

4. 변경도면 1부.  끝.