"꿈이 모이는 도시, 미래를 그리는 강남"

등록번호	어르신복지과-6369		주무관	어르신시설팀장		어르신복지과장		복지생활국장
			홍진주	오승찬		오성희		전결 03/11
등록일자	2024. 3. 11.
결재일자	2024. 3. 11.							오선미
공개구분	부분공개(5)
			협조자
					재무과장		이채목
					계약2팀장		代유지영

청담동 재너머경로당 신축 설계용역 계약 설계변경 계획

사업개요

❍ 용 역 명 : 청담동 재너머경로당 신축 설계용역

❍ 용역기간 : 2022. 7. 21. ~ 2024. 3. 31.

❍ 계약업체

건축 분야(대표사)	건축 분야(공동이행)	전기·통신·소방 분야
(주)아크로마키건축사사무소	(주)라온누리종합건축사사무소	(주)진원엔지니어링

변경내역

구 분	당 초	변 경	증/감 금액
계약금액	************	************	******************
준공기한	**********	***********	***********

❍ 변경사유

- *********************
**********************************

- *****************************************************************************************************************************

	강 남 구
(		어르신복지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• ⌜지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률⌟ 제22조 • ⌜지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령⌟ 제75조
공직선거법 검토	이 사업(업무) 추진과 관련하여 공직선거법 위반사항 등을 검토하였습니까?
	• 해당사항없음
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 과업기간 중 계약변경 사유 발생
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 2024년 예산서
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 시설 이용 어르신
(예상) 공공갈등 등급진단	이 업무(사업)과 관련하여 아래 민원발생 관련사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 다수의 이해관계인 존재여부 ( ) ⑦ 법률 등 제도적 변경 필요여부 ( ) ② 강남구와 갈등발생(예정포함) ( ) ⑧ 갈등전개 과정에서 집단화 예상 ( ) ③ 언론매체 보도 여부 ( ) ⑨ 갈등의 표출형태(민원 등) ( ) ④ 보도된 횟수 ( ) ⑩ 해결방안(대책) 가능여부 ( ) ⑤ 보도된 매체 수 ( ) ⑪ 별도의 예산소요 여부 ( ) ⑥ 갈등해결 예상 소요기간 ( ) ⑫ 2개 이상 관련기관 협조여부 ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요 (7개 항목 이상 체크 시 감사담당관 협조결재)
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ③ 미래행정 수요예측 및 시장조사 ----------------- ( ) ④ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑤ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음.

청담동 재너머경로당 신축 설계용역 계약 설계변경 계획

재너머경로당 공사비 중간산출 결과 국제정세(건설 원자재 가격 상승) 등에 의해 총공사비가 당초보다 증가되었으며, 건축물 에너지효율등급·제로에너지건축물 및  B.F. 등 각종 예비인증 획득기간 소요로 인해 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75조

행정안전부 예규 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장 7절

Ⅱ		용 역 개 요

용 역 명 : 청담동 재너머경로당 신축 설계용역

용역기간 : 2022. 7. 21. ~ 2024. 3. 31.

계 약 자 : ㈜아크로마키건축사사무소 (대표자 : 정선교)

㈜라온누리종합건축사사무소 (대표자 : 김진호)

㈜진원엔지니어링 (대표자 : 이규황)

계약금액 : ************

예산과목 : *******************************************************************

사업추진경과

*******************************************************

**********************************************

********************************************

*********************************************

************************************************

Ⅲ		설 계 변 경

변경내용 : 계약금액 조정 및 준공기한 연장

구 분	당 초	변 경	증/감 금액
계약금액	************	************	******************
준공기한	**********	***********	***********

❍ 감독공무원 검토 의견 : 적 정

❍ 관련 근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제271호, 2024. 1. 1.)

※ 지연배상금 : 미부과

⇒ 발주기관의 책임으로 공사착공 및 용역착수·제조의 착수가 지연되거나 시공·용역수행·제조가 중단된 경우

설계변경 사유

❍ **********************************

***********************************

***************************************

****************************************************

❍ ***************************

********************************************************************

**********************************

Ⅳ		행 정 사 항

설계변경 사항 검토 후 변경 요청 건 승인

일상감사 및 계약심사 : 감사담당관

설계용역 변경계약 : 재무과

붙임 : 청담동 재너머경로당 설계변경 요청 1부.  끝.