문서번호	기전설비과-2102
결재일자	2024. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김명성		황인정	03/14
			이유국
협조

올림픽대교 북단외 1개소 승강기 전기공사 설계변경 및 준공기한 연장 검토 보고

2024. 3.

미래한강본부

(기전설비과)

올림픽대교 북단외 1개소 승강기 전기공사

설계변경 및 준공기한 연장 검토 보고

「올림픽대교 북단외 1개소 승강기 전기공사」시공사로부터 제출된 실정보고에 대한 내용 및 보험료 정산을 반영한 설계변경 및 준공기한 연장 검토내용을 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 올림픽대교 북단외 1개소 승강기 전기공사

○ 계 약 일 : 2023. 5. 19.

○ 계약금액 : *****************************

○ 계약기간 : 2023. 5. 19. ~ 2024. 3. 20.

○ 공사위치 : 올릭픽대교북단, 영동대교북단

○ 계 약 자 : **************

Ⅱ		설계변경 내용

○ 계약금액 변경

(단위:원)

구 분		금 액		증·감액	비 고
		당 초	변 경
도급금액	공급가액	***********	***********	************
	부가세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************

○ 설계변경 사유

- 영동대교 가로등 배관 이설(동부도로사업소 관리 시설물)

- 영동대교 승강기 난간 스텝등 추가 설치

- 보험료 정산

구분	당초	변경	증·감
공사기간	*************************	*************************	*****

○ 준공기한(연장) 검토

※ 선행공정인 건축 및 승강기 설치 일정에 맞춰 준공기한 변경

○ 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강접근체계개선, 한강공원 승강기 신설       및 개선, 시설비및부대비, 시설비

Ⅲ		행 정 사 항

○ 공사 설계변경에 따른 변경계약 의뢰(총무과)

붙임  1. 시공사 실정보고(3,4차) 각 1부

2. 실정보고도면(3,4차) 각 1부

2. 공사 설계변경 내역서 1부

3. 제비율 검증확인서 1부.  끝.