아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「서울숲 군마상 CCTV외 2개소 정비」 설계변경 요청

1. 시설과-2081(2024.3.15.)와 관련입니다.

2. 「서울숲 군마상 CCTV외 2개소 정비」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명: 서울숲 군마상 CCTV외 2개소 정비

나. 요청내용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
공사기간	2024.2.5.~2024.3.29.	2024.2.5.~2024.3.29.	변동없음
공사금액[원]	***********	***********	*************

다. 공사기간 연장 사유: 공정 추가(굴착공사 및 바닥재 교체)에 따른 설계 변경요청

라. 책임 소재 및 지체 상금 부과 여부: 시설과, 미부과

마. 예산과목: 동부공원여가센터 시설과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원여가센터 산하공원 유지관리, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 동부공원여가센터 공원운영과)

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시 설 과 장
주무관	황예서		시설관리팀장	김현태		시설과장	03/15
하종식
협조자
시행	시설과-2083	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원여가센터 시설과 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2965	/전송	02-460-2971	/	yshwang13@seoul.go.kr	/	부분공개(5)