문서번호	정수시설과-3117
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진		代전준원	03/15
			전종원
협조

풍납취수장 전기공사 관급자재(조명기구)

납품기한 연기 검토보고

2024. 3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 전기공사 관급자재(조명기구)

납품기한 연기 검토보고

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5678

우리 센터에서 추진중인「풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사(장기2차)」에 필요한 자재의 납품기한 연기 소요가 발생하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

▢ 관련근거

○ 물품구매(제조)계약일반조건(기획재정부계약예규 제583호, '21.12.1.)

▢ 계약현황

○ 계 약 명 : 풍납취수장 전기공사 관급자재(조명기구) 조달구매

○ 구매내역

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 구매금액 : 금8,124,940원 ※조달수수료 34,940원 포함

○ 납품기한 : 2024. 3. 27.

○ 하자담보책임기간 : 물품검사(수)일로부터 3년

▢ 계약 변경사항

○ 납품기한 연장

- 계약금액 변동 없이 납품기한을 2개월 연장

·당 초 : 2024. 3. 27.  ->  변 경 : 2024. 5. 27.

○ 변경사유

*****************************************************

******************************

**********************************

▢ 검토내용

○ 검토자 의견

**************************************

************************************************

○ 조치계획

- 행정관리과에 납품기한 2개월 연기 요청

- 관련업체(전기공사 시공업체 및 납품업체)와 납품일정을 수시협의하여, 변경 기한내 조명기구 설치 예정

▢ 향후계획

○ '24. 3. : 납품기한 연기 의뢰

○ '24. 5. : 물품 납품 및 검수

붙임  1. 감리검토의견서 1부

2. 분할납품요구서(조명기구) 각 1부.  끝.