문서번호	정수시설과-2603
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박성신		이재복	03/15
			최철웅
협조	주무관		박성혜
	주무관		김현철

2024년 전기설비 유지보수공사 시행계획

2024. 03.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 전기설비 유지보수공사 시행계획

정수시설과장 : 이재복☎3146-5370 /  담당 : 박성신☎3146-5380

정수센터 내 각종 전기설비 유지보수를 전문업체에 의한 연간단가계약으로 시행하여 고장 또는 긴급상황 발생 시 신속하게 대처함으로써 정수시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 정수센터 기전설비 유지보수 연간단가계약 시행(기전설비과-797, ’13.2.20.)

ㅇ 상수도 기전설비 유지보수 설계기준 개정·보완 계획(기전설비과-1207, ’24.2.7.)

□ 추진방향

ㅇ 전기설비 고장 및 긴급상황 발생 시 신속한 복구로 정수시설 운영중단 최소화

ㅇ 노후설비 및 소규모 보수 적기시행으로 시설물 유지관리 효율성 제고

ㅇ 2024년 본부 기전설비 유지보수 설계기준에 의거 발주금액 산정

□ 발주계획

ㅇ 공 사 명 : 2024년 전기설비 유지보수공사(장기계속계약)

ㅇ 공사내용

- 수배전반 등 전기설비 고장 또는 긴급상황 발생 시 신속한 보수

- 노후 전기설비 예방정비 및 소규모 보수공사 시행

- 전기설비 안전진단 및 각종 점검결과 부적합사항 보완·개선 등

ㅇ 공사기간 : 착공일 ~ 2025.3.31.(총차)

- 1차 : 착공일 ~  2024.12.31.

- 2차 : 2025.1.1. ~ 2025.3.31.

ㅇ 소요예산 : *************************

*********************************************************

******************************************

***************************************************

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(전기설비 유지관리)

ㅇ 계약방법 : 전자공개 수의계약(제한경쟁)

ㅇ 입찰참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업 면허 등록업체로서,

- 주된 영업소의 소재지가 서울특별시 또는 경기도인 업체

□ 추진일정

ㅇ 2024.03월 : 공사발주

ㅇ 2024.04월 : 총차·1차 공사 계약체결 및 착공

ㅇ 2024.12월 : 1차공사 정산 및 준공

ㅇ 2025.01월 : 2차공사 계약체결 및 착공

ㅇ 2025.03월 : 총차·2차공사 정산 및 준공

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 2024년 유지보수 산출단가 내역서(본부 기전설비과) 1부.  끝.