문서번호	정수시설과-3069
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박상현		김영준	03/15
			전종원
협조
	주무관		박소현

- 보안기능 강화를 위한 -

취약 방호울타리 교체 및 철거계획 보고

2024. 3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

보안기능 강화를 위한

취약 방호울타리 교체 및 철거계획 보고

소장:전종원☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 :박상현☎5680

우리정수센터에 설치된 취약 방호울타리의 선제적 교체를 통하여 국가중요시설인 정수센터 보안 기능을 강화하고자 함.

Ⅰ		추진개요 및 현황

추진근거

ㅇ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제23조 및 제24조

ㅇ 보안 및 방호 강화 회의【본부 생산관리과-22535(2022.6.15.)】

- 정수센터 올릭픽대로변 울타리 노후로 인한 방호시스템 강화 추진

추진목적

ㅇ 방호기능 향상으로 국가 중요 시설인 정수장에 대한 보안 강화

시설 및 설치현황

구 분	경간 크기	재 질	당초연장	변경연장	비 고
			4.5㎞	4.5㎞
능형망 울타리	W2.0m, H2.4m	철+PVC(피복)	2.25km	2.35km	교체대상
메쉬 울타리	W2.0m, H2.4m	철+아연합금	2.25km	2.15km

구 분	합	2023년(완료)			2024년
		소계	자체 시행	도시기반시설본부 (원인자시행)	소계	자체 시행	도시기반시설본부 (원인자시행)
설치연장	2.35㎞	1.34㎞	1.1㎞	0.24㎞	1.01㎞	0.56㎞	0.45㎞

※ 연장변경 사유

·쥐산측면에 설치된 이중 방호울타리가 현장조사 결과 모두 능형망 울타리로 확인되어

교체대상인 능형망 울타리 연장이 증가됨(총 연장은 변동없음)

Ⅱ		추진계획

사업계획

ㅇ 사 업 명: 취약 방호울타리 교체 및 철거공사

ㅇ 사업개요: 2정수장 활성탄흡착지동 ~ 쥐산(2정수장, 쥐산일부)

(취약 방호울타리 560m 교체 및 철거)

ㅇ 사업기간: 2024. 4. ~ 8.

ㅇ 총사업비: 119,352천원

공사별 세부 사업계획

1		취약 방호울타리 교체(물품구매)

ㅇ 사업규모: 방호울타리 560m 교체

- YL형울타리(메탈라스망, W 3.0m×H 2.4m) 186경간 설치

ㅇ 사업비: 금102,852천원(조달수수료 포함)

- YL형울타리(W 3.0m×H 2.4m): 550천원/경간 × 186경간  = 102,300천원

ㅇ 예산과목:

- 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수     수선유지교체비, 수선유지비(정수비, 취약 방호울타리 교체)

ㅇ 계약방법: 조달구매 (다수공급자 2단계 경쟁, 현장설치도)

- 제안서평가 세부기준: 종합평가방식, 가격A형

ㅇ 설치도 및 현황사진

설 치 도	현 황 사 진

2		기존 취약 방호울타리 철거공사

ㅇ 사업규모: 기존 취약울타리 560m 철거

- 기존 취약 능형망울타리(W 2.0m×H 2.4m) 280경간 철거

- 폐기물처리 35ton 등

ㅇ 사업비: 금16,500천원(부가세 포함)

- 능형망울타리(W 2.0m×H 2.4m): 17.4천원/경간 × 280경간  ≒ 4,853천원

- 폐기물운반 및 처리: 49천원/t × 35ton ≒ 1,715천원

- 가림막 설치 및 철거(6,570천원) 등

ㅇ 예산과목:

- 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수     수선유지교체비, 수선유지비(정수비, 취약 방호울타리 교체)

ㅇ 계약방법: 수의계약(1인)

Ⅲ		향후계획

2024년 3월 : 업체추천 의뢰(한국금속울타리공업협동조합)

2024년 4~5월 : 조달구매 의뢰(서울지방조달청)

2024년 6~8월 : 납품 및 현장설치(준공)

붙임 산출내역서 1부.  끝.