아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	조달구매 변경 통보[풍납취수장 전기공사 관급자재(조명기구) 조달구매]

1. 정수시설과 -3123(2024.03.18)호와 관련입니다.

2. 『풍납취수장 전기공사 관급자재(조명기구) 조달구매』건에 대하여 아래와 같이 변경계약체결 되었음을 통보합니다.

가. 계약체결 내역

물품	계약금액	합계금액(원)	계약일자	당초납품 기한	변경납품 기한	비 고
	수수료(원)
풍납취수장 전기공사 관급자재(조명기구) 조달구매	8,090,000	8,124,940	2024.02.26	2024.03.27	2024.05.27
	34,940

붙임  1. 분할납품요구서(썬래이)납기변경 1부.

2. 분할납품요구서(파인)납기변경 1부.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박소현		행정관리과장	김성수		영등포아리수정수센터소장	03/18
전종원
협조자
시행	행정관리과-3589	(	2024. 3. 18.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로, 11 영등포아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	number0917@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)