문서번호	건축과-7977
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 제355호

주무관		공공건축팀장	건축과장		도시관리국장		부구청장
김현지		代김현지	代이성철		강종삼		03/18
							김경탁
협 조						재무과장		이성수
						주차행정과장		김점희
						계약심사팀장		강연경
	기획경제국장			장병조		계약팀장		심은진
	건설교통국장			이상용		주차행정팀장		김귀은

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

-동명근린공원 지하주차장 건립공사(총차·1차)-

설계변경(출입구변경 설계비) 검토결과 보고

2024. 3. 14.

도시관리국

(건축과)

사전 검토사항

☞ 해당사항에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	■ 검토 완료(법규명: 지방계약법 )	□ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		□ 국비 ■ 시비 ■ 구비 □ 민자 유치 □ 기타( )	□ 비 예 산
주민의견 반영 및 참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 □ 기타( )	■ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
전문가 자문		□ 이행 완료 □ 예정 (이행방안: 워크숍, 자문위원회 등)	■ 해당 없음
협업 협치	타기관 및단체	□ 중앙부처 □ 서울시 □ 타 지자체 □ 투자출연기관 □ 민간단체 □ 구의원 업무공유 □ 기타( )	■ 해당 없음
	관 련 부 서	□ 협업 필요(해당부서: 생활체육과, 재무과 )	□ 해당 없음
추진절차		■ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 민간투자사업 심의 □ 타당성 검토 □ 공유재산 심의 □ 의회 심의 □ 기타 위원회 심의 등	□ 해당 없음
홍보방안		□ 보도자료 제공 □ 기자 설명회 □ 구 소식지 □ SNS □ 기타( )	■ 해당 없음
기타 고려사항		□ 인권영향평가(구민 인권보장 및 증진) □ 아동친화 및 아동영향평가 □ 교육영향평가(학생 안전과 수업권 확보) □ 여성친화 및 성별영향 □ 건강친화요소 □ 환경인지 □ 사회적 약자 배려 □ 타 기관 사례 파악 비교 □ 안전대책 □ 유지관리비용 □ 시장조사 □ 미래행정 수요예측 □ 고용효과 □ 행사의전 □ 바른 우리말(행정순화어)

-동명근린공원 지하주차장 건립공사(총차·1차)-

설계변경(출입구변경 설계비) 검토결과 보고

「동명근린공원 지하주차장 건립공사」와 관련하여, 주차장 출입구를 북측(아리수로변)으로 변경하는 도시관리계획이 결정(변경) 고시됨에 따라, 출입구 변경 설계를 위한 설계변경에 대한 검토를 보고드림

1		공사개요

○ 대지위치 : 강동구 고덕로 229번지 일원(동명근린공원 내)

○ 규    모 : 지하1층/지상1층, 연면적 7,104.0㎡, 주차장 226대

○ 용    도 : 자동차관련시설(주차장)

○ 시 공 사 : (주)미진이엔씨 (대표 이화준) 외 2개사

***********************************************************************************************************

○ 건설사업관리용역사 : (주)신한종합건축사사무소(대표 김상훈) 외 2개사
******************************************************************************************************

**************************************

*************************************

2		관련근거

○「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행안부예규 제277호, 2024.2.15.)」제9장 계약 일반조건

***************************************************************

**********************************************************

***********************************************************************************

○「도시관리계획(고덕택지 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시」(서울특별시고시 제2023-488호, 2023.11.9.)

******************************************************

*********************************************************

**************************************************

3		설계변경내용

□ 설계변경 금액

(단위 : 천원)

***	***	***	***
***	**********	**********	*********
***	*********	*********	*********

**********************************

******************************************************************

***********************************************************************

□ 주요 변경설계 내용

********************************************* ************************************* *********************************** *******************

3		검토 및 처리의견

○ 계약상대자가 제출한 실정보고서가 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정 규정에 적합하므로 승인 처리하고,

***************************************************************************

******************************************************

붙임  1. 출입구 변경 민원 실정보고서 각 1부.
2. 도시관리계획(고덕택지 지구단위계획) 결정(변경)추진 방침서 1부.
3. 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시문 1부.
4. 시공사 실정보고 및 설계변경 내역서(총차, 1차수) 각 1부.  끝.