시  민

문서번호	급수운영과-4504
보존기간
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
노병권	代노병권	권오정	03/18
			정진일
협 조

「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역 」준공기한 연기 검토 보고

2024. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역」

준공기한 연기 검토 보고

************************************************

우리사업소 시행중인 「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역」과 관련하여 배수지 내부 방식공사 지연에 따른 ‘준공기한 연기’ 검토 결과를 보고 드림

□ 관련 근거

○ 급수운영과-1447(2024.1.26) : 신월배수지(2지) 유입밸브 교체 무단수                                     실증테스트 추진겨로가 및 작업계획 보고

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역

○ 용역개요 : 신월배수지 40,000㎡, 신정배수지 50,000㎡

○ 용역기간 : 2023. 4. 14. ~ 2024. 3. 31.

○ 도 급 자 : (주)한국국토안전연구원 대표 오성균 외 1

○ 용역금액(도급액) : 금114,379,000원

○ 현 공정률 : 96%

□ 용역 진행 현황(2024.3.15. 기준)

배수지명	진단항목	용역수행 결과	비 고
신월배수지	토목구조물 외관조사	최종 보고서 작성 완료
	기전설비 외관조사
	비파괴 시험결과
	상태평가 평가 결과
	안전성 평가 결과
신정배수지	토목구조물 외관조사	최종 보고서 작성 완료
	기전설비 외관조사
	비파괴 시험결과
	상태평가 평가 결과
	안전성 평가 결과

□ 보고 내용

***********

**********************************

*****************************************

*****

*******************************************************

***************************************

□ 검토 의견

****************************************

************

****	*******
****	****************************
****	***********************************

*****************

□ 향치 계획

○ 기술심의(기술심사담당관)                : 2024. 3월 하순

○ 기술심의 보완                          : 2024. 4월 초순

○ 최종보고회 개최 및 준공                : 2024. 4월말

끝.