문서번호	시설건설과-2807
결재일자	2024. 3. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
오장록		이승우	03/19
			전태호
협조

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

「탄천(강남구)~한국가스안전공사구간 공법변경 등」검토보고

2024.  3.

서울아리수본부

(시설건설과)

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

「탄천(강남구)~한국가스안전공사구간 공법변경 등」검토보고

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설건설과장 : 이승우☎1490 담당 : 오장록☎1497

*******************************************************************를 검토하고 보고드림.

Ⅰ		공사 현황

□ 공 사 명 : 광암수계 배수관로 정비공사(1공구, 1차수)

□ 규    모 :  D=300~1,800㎜, L=8.3㎞

□ 공사기간 : '22. 3. 21. ~ '27. 8. 16.(1차수 '22. 3. 21.~'24. 9. 25.)

□ 도 급 비 : 55,241,000천원(1차 17,705,000천원)

□ 시 공 사 : 계룡건설산업(주) 대표 이승찬 외 1개사

□ 감 리 사 : (주)천일 대표 김창욱 외 4개사

Ⅱ		관련 근거 및 문서

□ 관련 문서

ㅇ****************************************************************

□ 관련 근거

ㅇ 공사계약 일반조건[행정안전부예규 제138호]

	< 제19조 설계변경 등 >
① 설계변경은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다. 1. 설계서의 내용이 불문명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우 3. 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우 4. 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

Ⅲ		보고내용

□ **********************

***********	****

ㅇ********************************************************************************

※ PIP 공법과 PIP-3D 공법 비교

구 분	******	*********	**
*** ***	****************** ******************** ************	****************** ****************** ******************* ******************	*
****	***************** ******	******************* ***********	*
****	******************* *************	****************** ******************* *****	*
*** ***	************** ***************** *****************	***************** ***************** *****************	*

□ *******************

******

ㅇ *************************************************************************************************************

ㅇ ********************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		검토내용

□ 건설사업관리단 검토의견

************************

ㅇ **********************************************************

ㅇ **************************************************************

※ 공법변경에 대한 설계사 의견

- ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************

ㅇ *****************************************************************************************

ㅇ ***********************************************************************************

*****************

ㅇ *****************************************************************************************************************************************

(단위 : 본)

공 종	규 격	수 량	단 가 (원)	비 고
*********	************	**	*********	*
*********	************	*	*********	****
*********	************	*	*********	****
*********	************	*	*********	****

※ 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계 변경)의 6(소요자재의 수급방법 변경)

- *************************************************************************************************.

※ ********************************************************************************

구 분	단위	당 초	변 경	증 · 감)		비 고
1. 배수관로(1공구)
터파기/보통토사	㎥	***	*	**	***
되메우기/토사(기계)	㎥	***	*	**	***
유용토 운반/ 토사	㎥	***	*	**	***
사토처리/ 토사	㎥	**	*	**	**
조립식 간이 흙막이공	m	**	*	**	**
강관접합	개소	*	*	**	*
강관부설	본	*	*	**	*
강관용접부 도장	개소	*	*	**	*
게이트제수변 접합 및 부설	기	*	*	**	*
강관 철거	m	*	*	**	*
제수변 철거	개소	*	*	**	*
KP매커니컬 접합	개소	*	*	**	*
이탈방지 압륜접합	개소	*	*	**	*
주철관 부설	개소	**	*	**	**
주철관 철거	m	*	*	**	*
기존관 폐관	식	*	*	**	*
사급자재	식	*	*	**	*
4. 신관삽입 PIP-3D공법
강관인입설비 설치 및 철거	개소	*	*	*	*
관세척	m	*	****	*	****
기존관 3차원 설계	m	*	****	*	****
강관인입(직관-PIP-3D)	m	*	****	*	****
강관인입(이형관-PIP-3D)	m	*	***	*	***
강관설치(6m, PIP-3D)	m	*	****	*	****
강관설치(6m 미만, PIP-3D)	m	*	***	*	***
관접합(PIP-3D, 1000mm)	개소	*	**	*	**
강관용접부도장(내부, 1000mm)	개소	*	**	*	**
기존관 충전	㎥	*	***	*	***
환기설비 설치및철거(PIP-3D)	개소	*	*	*	*
환기설비 기계손료(PIP-3D)	일	*	**	*	**
부상방지공	개소	*	**	*	**
사급자재비	식	*	*	*	*	***************
5. 신관삽입 PIP-HRTS공법
관세척	m	**	*	**	**
기존관 3차원 설계(PIP)	m	**	*	**	**
강관인입(직관-PIP)	m	**	*	**	**
강관설치(직관-PIP)	m	**	*	**	**
강관 자동용접 접합(PIP)	개소	**	*	**	**
강관도장(내부-PIP)	개소	**	*	**	**
부상방지재	개소	**	*	**	**
기존관 충전	㎥	***	*	**	***
강관삽입 간격재	개소	**	*	**	**
환기설비 기계손료	일	**	*	**	**
강관직관운반(L=20.2km)	본	**	*	**	**
강관이형관운반	ton	*****	*	**	*****
사급자재비	식	*	*	**	*

ㅇ 수량 증 · 감) 내용

(단위 : 천원)

공 종	당 초		변 경		증 · 감)
	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
□ 직접공사비		*******		*******		*	******
1. 배수관로(1공구)	*	******	*	*	*	**	******
4. 신관삽입(PIP-3D)공법	*	*	*	*******	*	*	*******
5. 신관삽입(PIP-HRTS)공법	*	*******	*	*	*	**	*******
□ 간접공사비		******		******		*	******
1.제경비	*	******	*	******	*	*	******
공 사 원 가		*******		*******		*	******
부가가치세		******		******		*	*****
물가변동액		******		*		**	******
도급공사비		*******		*******		*	******
관급자재비		******		*		**	******
총 공사비		*******		*******		*	******

ㅇ **************************

□ 발주처 처리의견

ㅇ *******************************************************************************************

ㅇ *************************************************************

Ⅴ		조치 계획

□ ***************************************************

* □ ********************************************************************************

붙 임 : 1. PIP-3D 용접부 품질확보방안(최종) 1부.

2. 실정보고 관련 공문 각 1부.  끝.