문서번호	토목부-5536
결재일자	2024. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
강청금		김상용	03/19
			이임섭
협조
	주무관		서호태

- 천호대교 남단IC 연결체계 개선공사 -

PC방호벽 처리방안 검토보고

2024. 03.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 천호대교 남단IC 연결체계 개선공사-

PC방호벽 처리방안 검토보고

본 공사에서 사용 후 현장에 존치되어 있는 PC방호벽 사용처조회 후 그에 따른 처리방안을 검토보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경)

ㅇ 천호 남단(감리) 제2023-304호(2023.11.03.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 천호대교 남단IC 연결체계 개선

ㅇ 공사규모 : 연결로 개설(1차로) 2.95km(지하차도 L=194m)

ㅇ 도 급 비 : 26,413백만원(3차 2,850백만원)

ㅇ 공사기간 : 2014.02.~2025.11.(3차 2023.08.~2024.05.)

ㅇ 시 공 사 : 대우산업개발(주) 외 1개사

ㅇ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외 4개사

□ 추진경위

ㅇ 2023.10.06. : PC방호벽 사용처 조회 요청(감리단)

ㅇ 2023.10.10. : PC방호벽 사용처 조회 ⇒ 회신없음

ㅇ 2024.02.27. : PC방호벽 사용처 재조회 ⇒ 사용요청(서대문구 도로과)

- 시설물 인도시기 및 수량 협의 예정(4월중, 약 50EA)

□ 검토내용

ㅇ PC방호벽 처리(콘크리트 파쇄) 수량 내역서 반영

- PC 방호벽 개수 : 252EA(※ 서대문구 도로과 인도수량(약 50EA)은 추후 정산)

- 처리공종 : 무근콘크리트깨기, 폐콘크리트 상차, 폐기물 처리비

********

********************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

******************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************

□ 조치계획

ㅇ PC방호벽 폐기물 처리 실정보고는 건설사업관리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 원활한 사업추진을 위하여 실정보고를 승인하고 추후 설계변경 반영하고자 함.

붙임 : PC방호벽 처리방안 실정보고서 1부.  끝.