문서번호	원수관리과-525
결재일자	2024. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김석광		代김종필	03/19
			윤준성
협 조
	행정관리과장			정종철

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

설계변경 시행계획

['23년 취수장 전기설비 유지보수공사(총차,2차)]

2024.  3.

강북아리수정수센터

( 원수관리과)

설계변경 시행 보고

['23년 취수장 전기설비 유지보수공사(총차,2차)]

강북아리수정수센터 소장 : 윤준성☎3146-5801 원수관리장 :박철호☎2490 담당 : 김석광☎5226

2023년 취수장 전기설비 유지보수공사(연간단가 2차) 시행 중 설계변경 사항이 발생하여 다음과 같이 변경 시행하고자 함

Ⅰ				공 사 개 요

□ 공 사 명 : '23년 취수장 전기설비 유지보수공사(연간단가2차)

□ 공사기간 : 총차 - 2023. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.

2차 - 2024. 1. 1. ~ 2024. 3. 31.

□ 계약금액 : 총차 ******************************

□ 도 급 자 : *****************

□ 공사내용 : 전기설비 유지보수 공사 1식

Ⅱ				설계변경 내용

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증감액
	당초	변경
******	**********	**********	*
**	**********	**********	******
**	*********	*********	*********

□ 적용단가

○ 기존단가 : 계약단가 적용

○ 신규단가 : 낙찰율 적용 (87.745%)

□ 주요 변경내용(2차)

공 종	주요 변경사항	사 유
계약 공종	-기존내역 물량증감 (별첨 내역서 참조)	작업지시 결과 물량증감 반영
누액감지센서설치	-전극식레벨, 3선 3극 3개설치	중화설비실 전극봉 추가 설치 ⇒ 가스안전공사 지적
조명등 철거,설치	-LED 투광등 20개 철거,설치 -LED 투광등 2개 신설	강북 및 구의계열 펌프실 중층 공동구
전식방지시설 설치	-희생양극식 전압측정 단자 설치 2개	희생양극단 단자 TB1, TB16 전압측정 단자 소손
제경비 및 보험료	-보험(건강,연금,노인장기) -고용개선지원비	각종 보험료 및 제경비 정산

Ⅲ				향 후 계 획

□ 2023년 취수장 전기설비 유지보수 공사(2차) 설계변경 사항에 대한 심의위원회를 개최하고, 심의결과에 따라 설계변경 시행

□ 추진일정

○ 심의위원회 개최 및 보고 : 2024. 3. 19.

○ 설계변경 시행 : 2024. 3. 20..

붙임 : 1. 설계변경 내역서(총차,2차) 1부

2. 검증확인서(총차,2차) 2부.  끝.