문서번호	계획설계과-2651
결재일자	2024. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
홍원기	김근용	03/19
		백광인

강북~암사 송수계통연결 공사 관련

구리시 방문 협의 결과보고

2024.  3. 19. (화)

서울아리수본부

(급수부)

- 강북~암사송수계통 연결공사 관련 -

구리시 방문 협의 결과보고

급수부장 :백광인☎3146-1401 계획설계과장 : 김근용☎1410 담당 : 홍원기☎1417

강북~암사 송수계통연결 공사 관련하여 도로 굴착 승인 사전 협의를 위한 위한 구리시 도로과 방문 협의 결과를 보고드림

□ 출장개요 및 결과

❍ 일  시 : 2024. 3. 19.(화) 10:00~15:30

❍ 장  소 : 구리시청(도로과)

❍ 출장자 : 계획설계과장, 홍원기 주무관

❍ 협의결과

(구리시 도로과) ·박대승(팀 장) ·박경현 주무관	협의내용	- 강북~암사 송수계통연결 관련 도로굴착 구간 노선 설명 및 굴착 승인 사전 협의
	협의결과	▶ 1구간(벌말로) : 구리 시내를 통과해 출·퇴근 시 강변북로 진입로와 연결되어 상습적인 교통 정체구간으로 민원 다수 발생 우려됨 ▶ 2구간(코스모스길) : 벌말로에 비해 교통량은 적고, 현황 도로로 사용되고 있으나, 사유지 구간이 다수 존재하여 토지 보상에 대한 사전 검토 필요 ▶ 공사기간(2년 이상)이 장기간이라 주민 불편 극심 우려 - 별내선 공사로 인한 주민피로도 극심 - 본 공사는 구리 시민들의 혜택도 없는 타 지자체 공사 인데 장기간 공사로 인한 주민 불편이 상당히 부담 ▶ 요구자료 - 기본계획 당시 검토했던 타 노선이 왜 안되었는지에 대한 자료 요청 - 굴착 심의 요청 전에 상부 보고를 위한 구리시 통과 구간에 대한 사전 교통소통대책 제출 요청
	종합의견	▶ 별내선 공사 기간동안 교통 불편으로 인해 주민 피로도가 극심한 상황에서 구리시와 상관없는 타 지자체 상수도 공사 2년 이상 시행에 대한 큰 부담으로 시장님 보고 후 검토될 사안임