문서번호	토목부-5692
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장 직무대리
김종혁	배태인	이임섭		03/20
				이승석
협 조
	동남권사업과장		심재욱

준공기한 연기 검토 보고

【국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계(2공구)】

2024. 3.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

준공기한 연기 검토 보고

**********************에 따른 도로개선사업의

설계용역(2공구) 준공기한 연기 검토 보고임

Ⅰ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계

ㅇ 총사업비 : 7,108억원 ************************************)

ㅇ 설계용역 개요

구 분	용역사	용역내용	용역기간	용역금액 (백만원)
설계용역	(2공구) ㈜태조엔지니어링 등 4개사	올림픽대로 구조개선, 청담1,2교 확장 등	'20.03.16. ~'24.3.30.	*****

ㅇ 하천점용허가 추진현황

************************************

************************************

************************************

********************************************

***********************************************

****************************************

*****************************************

***********************************************

Ⅱ		설계변경 내용

□ 준공기한 연기

ㅇ 하천점용 허가 보완 요청에 따른 준공 기간 연기 필요

- *****************************************************************

********************************************************

【 용역기간 변경 내용 】

구 분		당초	변경	비고
설계용역	********************	'20.03.16. ~'24.3.30.	********** **********	******

□ 건설사업관리자 검토의견

ㅇ ********************************************************

Ⅲ		향후 추진계획

ㅇ '24. 03. : 설계변경 통보 및 변경계약 의뢰 (토목부→도로계획과)

ㅇ '24. 04. : 설계 1,2,3,4 공구 설계 완료 (예정)

ㅇ '24. 04. : 설계 및 건설사업관리(설계감리)용역 준공

붙임 : 설계변경 요청서(공문) 1부. 끝.