작업기간 연기보고(노후밸브 116~123)

문서번호	급수운영과-5066
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	이기명	신정우	代박상열

“2023년 마포구 관내 상수도시설물 정비공사”의 작업지시 건에 대하여 아래와 같이 작업기간을 연기하고자 아래와 같이 보고합니다.

2024. 3.

보고자: 지방시설주사  성명: 이기명

건  명

작업기간 연기보고(노후밸브 116~123)

내용

작업지시 개요

작업지시번호	공사위치	비고
노후밸브 116~123 (*************)	*****************	************* ************ ***********

2. 보고내용

- 작업지시번호 121번(*******) 철개교체에 따른 진동 및 소음 민원   (*****)으로 당초 작업기간 내 완료가 어려운 관계로 부득이 작업기   간을 연기할 필요가 있음.

3. 조치의견

- 위 사유로 인해 작업기간을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

작업지시번호	공사위치	작업기간
		당초	변경
노후밸브 116~123	상암동805-1앞 등 8개소	**************************	************* ***********

4. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  공사 연기 신청서 1부.  끝.