문서번호	수처리연구과-2652
결재일자	2024. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
김태균	임춘길	이준호	안재찬		03/21
					윤희천
협 조
	주무관			이광제
	주무관			박지현

서울형 고도처리공정 파일럿플랜트 구축계획

2024. 3.

서울물연구원

(수처리연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

서울형 고도처리공정 파일럿플랜트 구축계획

수도연구부장 :안재찬 ☎1810 수처리연구과장 :이준호 ☎1820  담당 :임춘길,김태균,이광제,박지현☎1804

염소소독부산물, 미분탄, 소형생물 등 수질안전성 확보 및 10년간 정수장 개량에 대비 서울형 파일럿플랜트를 구축하여 최적 설계인자를 제안하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

ㅇ 서울시 상수도 종합계획 2040 (기획예산과-8261호, ‘23.7.5.)

- 초고도정수처리 공정 도입으로 소독부산물, 맛냄새 물질 획기적 개선

ㅇ 광암 재정비 기본 및 실시설계 착수보고회 (계획설계과-10618호, ‘23.12.5.)

- 전오존, 경사판침전지 도입 및 후여과공정 도입검토

□ 추진배경

파일럿플랜트

ㅇ 현 정수공정 파일럿은 용량이 작아 세부 설계인자 도출을 위해 용량증설 필요

ㅇ 실시간 데이터 기반 수질 및 공정관리를 위해 고도공정 자동화시스템 구축

□ 시설개요

ㅇ 사업대상 : 물연구원 파일럿플랜트 (구의1정수장)

ㅇ 설치일자 : 2002. 9.

- 고도처리(오존/활성탄) 공정 중심 플랜트 설치

ㅇ 용    량 : 15 m3/d

□ 사업개요

ㅇ (용량증설) 서울형 고도처리 파일럿플랜트 정비 및 시설증설 ('24.2.~8.)

- (기존) 15 m3/d ⇒ (증설) 최대 100 m3/d : 계열분리 실증실험

ㅇ (자동화설비 구축) 수질자동계측기 도입으로 실시간 데이터 분석 ('24.8.~10.)

ㅇ (공정제어시스템 구축) 정수공정 모니터링 및 제어 ('24.10.~11.)

Ⅱ		추진계획

□ 사 업 명 : 서울형 고도처리공정 증설 및 제어시스템 구축

□ 사업기간 : 2024. 2. ~ 2024. 12.

□ ****************

ㅇ 초고도처리공정 구축 : 신공정(전오존, 후여과) 도입 및 노후설비 교체

ㅇ 자동화 계측설비 구축 : 수질자동계측기(탁도, 암모니아성 질소 등) 설치

ㅇ 공정제어시스템 구축 : 약품자동화주입시스템 및 역세척자동화시스템

신공정 도입

① (신규) 전오존 공정 (전염소 대체)

- 유·무기물 산화, 소형생물 제어, 소독부산물 등

- 전염소 주입 중지 시 중염소 및 활성탄지에서 암모니아성 질소 제거

② (신규) 후여과 공정 (모래여과 + 여과망)

- 활성탄 미분탄, 생물막, 소형생물 등 유출 차단 및 공급계통 부하 최소

스마트시스템 구축

③ (신규) 약품자동주입시스템

- 응집제 등 약품주입 제어시스템 구축

④ (신규) 역세척자동화시스템

- 여과지, 활성탄지 수동 역세척 시스템을 자동화시스템으로 변경

□ 추진절차

과업내용		2024년
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1. 파일럿플랜트 현황 및 기본시설조사
2. 기술용역 타당성 심사 및 용역발주
3. 파일럿 플랜트 기술용역 수행
4. 서울형 고도공정 플랜트공사	◦기계공사
	◦전기설비 및 계측제어
	◦감리
5. 시운전 및 초고도처리수 생산

Ⅲ		행정사항

□ ***********************

□ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리,         수도시험연구장비 확충, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		사업효과

□ 노후 정수장 리모델링에 따른 정수장 개량방안 제공

□ 광암 정수장 기본 및 실시설계 추진에 따른 설계인자 도출

Ⅴ		향후계획

□ 파일럿플랜트 구축관련 기술용역 타당성 심사 (2024. 3.~)

첨부 : 서울형 고도처리공정 파일럿플랜트 기본구상(안)

첨부자료	서울형 고도처리공정 파일럿플랜트 기본구상(안)

*