문서번호	도시계획과-3522
결재일자	2024. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	보행일상권조성팀장	도시계획과장	도시공간기획관		도시공간본부장
김강현	유수환	양병현	김재용		03/21
					조남준
협 조

준공기한 연기 검토 보고

- 청량리역 新랜드마크 조성을 위한 도시전략계획 수립 용역 -

2024. 03. 20. (수)

도시공간본부

(도시계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 청량리역 新랜드마크 조성을 위한 도시전략계획 수립 용역 -

준공기한 연기 검토 보고

도시계획과장 : 양병현☎2133-8305 보행일상권팀장 : 유수환☎8313 담당 : 김강현☎8310

청량리역 일대에 광역거점을 조성코자 추진 중인 「청량리역 新랜드마크 조성을 위한 도시전략계획 수립 용역」준공기한 연기에 대하여 검토 보고함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진배경

ㅇ 서울 광역중심임에도 불구, 상대적으로 저평가된 청량리역 일대 중심지 위상 강화 필요

ㅇ 철도 신설, 광역환승센터 조성 등 개발 잠재력을 고려한 전략계획을 선제적으로 마련하여 동북권 광역중심에 걸맞은 랜드마크 조성 실현

□ 추진현황

ㅇ `23. 3.           : 용역 계약 및 착수

ㅇ `23. 4.~5.       : 착수보고회 개최 (4. 7. 서울시 / 5. 2. 동대문구)

- 철도공사 협조 등 원활한 사업추진을 위하여 공간혁신구역 선도사업 검토

ㅇ `23. 6.           : 공간혁신구역 선도사업 후보지 신청 (市→국토부)

ㅇ `23. 7.~ ’24. 3. : 발전구상(안) 수립 및 사업 추진방안 검토·보완

Ⅱ		시 행 계 획

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 청량리역 新랜드마크 조성을 위한 도시전략계획 수립

ㅇ 용 역 사 : ㈜유아건설턴트 종합건축사사무소

ㅇ 용역금액 : 285,000천원

ㅇ 용역기간 : `23. 03. 22. ~ `24. 03. 21.

ㅇ 과업범위 : 동대문구 청량리역 일원(약 36만㎡)

□ 과업내용

*************************************

****************************************

*****************************************

***********************************

*******************************************

******************************************

Ⅲ		변 경 내 용

□ 용역기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
용역 기간	’23. 3. 22. ~ ’24. 3. 21.	’23. 3. 22. ~ ’24. 6. 21.	증) 92일

□ 변경사유

ㅇ 2024. 3. 19.(화) 용역보고회에서 제시한 보완사항 및 추가자문 등 의견 검토·반영을 위한 추가 기간 필요에 따른 과업기간 연장 필요

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(귀책사유 : 서울시)

Ⅳ		향 후 계 획

□ '24. 3.        용역 변경계약 의뢰(→재무과)

□ '24. 4. ~ 5.   관련 기관 및 전문가 자문

□ '24. 6.        용역 준공

붙임  연기요청서 및 합의각서 1부.  끝.