문서번호	치수과-2316
결재일자	2024. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	03/22
			이유국
협 조

2023년 한강 저수로 준설공사(2차)

잠원·뚝섬 선착장 준설계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

미래한강본부

(시설부)

2023년 한강 저수로 준설공사(2차)

잠원·뚝섬 선착장 준설계획 검토보고

잠원·뚝섬 지역 선착장 조성을 위한 최소 수심확보 요청에 따른 준설 계획을 검토하여 보고 드림 *********************

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 저수로 준설공사(2차)

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 ~ 신곡수중보

ㅇ 공사기간 : '24. 1. 24. ~ '24. 5. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 6,155㎥, 반출 29,802.5톤

- 준설 : 서울마리나 4,700㎥, 잠실택시승강장 1,455㎥

- 반출 : 29,803톤

ㅇ 계약금액 : 709,675천원

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '24. 3. 15. : **************************

*******************************************

ㅇ '24. 3. 21. : 수상교통활성화를 위한 선착장 조성 관련 준설 요청

***************************************************

****************

□ 보고내용

**********************************

*********************************************************

*****************************

************************************

********************************************************************

□ 조치계획

***********************************

*******************************************

**************************************

ㅇ 공사의 시급성을 감안하여 우선 작업 지시하고 물량 증·감 사항은 추후 설계변경 조치

- 신규공종 물량은 계약상대자와 상호 협의한 협의율(94.25%) 적용

□ 향후일정

ㅇ '24. 3. 25. : 잠원·뚝섬 선착장 준설 작업시지(치수과 → 건설사업관리단)

ㅇ '24. 4. 26. : 준설작업 완료(예정)

붙임  1. 요청공문 1부.

2. 준설 위치도 1부.  끝.