문서번호	디자인산업담당관-2778
결재일자	2024. 3. 22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	공공미술사업팀장	디자인산업담당관
박유리	강연태	03/22
		김연주

2024 권역별 공공미술 작품구현 국제지명공모 추진계획

2024. 3.

디자인정책관

(디자인산업담당관)

2024 권역별 공공미술 작품구현

국제지명공모 추진계획

노을공원의 공공미술 명소가 될 아트 파빌리온의 수준 높은 작품 유치를 위해, 국내·외 작가를 대상으로 2024 권역별 공공미술 작품구현 국제지명공모를 추진하고자 함

Ⅰ		공모개요

□ 추진근거

ㅇ 2024 노을공원 공공미술 프로젝트 기본계획(디자인산업담당관-435호, ’24.1.15)

□ 사업개요

ㅇ 사업내용 : 서울을 대표하는 친환경 아트 파빌리온 구현

ㅇ 대 상 지 : 노을공원 내 조각공원 잔디마당 중앙부

ㅇ 추진방식 : 국제지명공모를 통한 작품 선정 및 제작, 현장설치

ㅇ 사업기간 : ’24. 1. ~ 12.

ㅇ 사업예산 : 1,442백만원 *****************************

□ 공모개요

ㅇ 공 모 명 : 2024 노을공원 아트 파빌리온 국제지명공모

ㅇ 추진기간 : ’24. 3. ~ 6.

ㅇ 공모방법 : 국내외 작가 4인(팀) 대상 지명공모 추진

ㅇ 작품분야 : 현대미술(설치, 조각, 미디어 등), 건축, 디자인, 조경 등

ㅇ 추진절차

작가추천 위원회	▷	작가선정 위원회	▷	지명공모 추진	▷	기술검토	▷	작품 심사위원회	▷	실시설계 심의진행	▷	작품제작, 공개
후보작가 12인 구성		공모참여작가 4인 선정		4인 지명공모		제출작 실현성 검토		당선작 및 후보작 선정		구조검토 각종 심의		작품제작ㆍ설치ㆍ개장
3월 중		3월 말		4~5월		5월 말		6월 초		6~7월		7월 말~10월

2		세부 추진계획

1. 공모 참여 작가 선정

□ 작가추천위원회

ㅇ 추천위원회 구성 : **************

* *************************************************************************

※노을공원 공공미술 프로젝트 운영위원회 구성·운영 계획(디자인산업담당관-1357, ’24.2.8)

ㅇ 추천대상 : 현대미술, 건축, 디자인, 조경 등 중견이상 국내외 작가(팀)

ㅇ 추천방법 : 각 위원 및 전문 시행사에서 작가 서면 추천(각 2인/팀)

ㅇ 추천기간 : ’24. 3. 11.(월) ~ 3. 15.(금)

ㅇ 결과활용 : 후보작가 12인(팀) 구성 후 작가 이력 및 포트폴리오 제작

- 노을공원 운영위원회 2차 자문회의(’24.3.15)를 통해 후보작가 12인 확정

※	노을공원 공공미술 프로젝트 운영위원회 2차 자문회의 결과보고(디자인산업담당관-1357, ’24.2.8)

□ 작가선정 심사위원회 ※작가추천위원회 중복참여 불가

ㅇ 선정위원회 구성 : **********************

* **************************************************************************************************

ㅇ 심사일정 : ’24. 3. 26.(화) 14:30 / 서울시청 8층 회의실

ㅇ 심사대상 : 작가추천위원회 선정 후보작가 12인(팀)

ㅇ 심사방법 : 후보작가 포트폴리오 심사(집합심사)

ㅇ 심사기준 : 주제적합성(20), 공공예술성(30), 작품성(30), 실행가능성(20)

- 심사기준별 고득점순(100점 만점)으로 참여 우선순위 선정 후 작가 의사 확인

ㅇ 결과활용 : 공모 참여에 동의한 최종 참여 작가 4인(팀) 선정

2. 작품공모 및 심사

□ 작품공모 추진

ㅇ 공모과제 : 자연과 사람을 연결하는 예술작품이자 공간이 되는 아트 파빌리온 제안

ㅇ 참여작가 : 작가추천ㆍ선정위원회를 통해 선정된 국내외 작가 4인(팀)

ㅇ 공모기간 : ’24. 4. 8.(월) ~ 5. 26.(일) (48일)

- 작가 공식 질의기간 : 24. 4. 8.(월) ~ 5. 12.(일)

ㅇ 제출자료 : 기본서류, 작품제안서 및 설계도면, 작품 설명영상

- 제출방법 : 이메일 제출(2024seoulartpavilion@gmail.com)

ㅇ 접수마감 :  ’24. 5. 26.(일) 12:00까지 ※한국시간 기준

- 작품 제안서 등 제출자료 번역 : 24. 5. 27.(월) ~ 5. 29.(수)

□ 작품 기술검토 및 사전 질의응답

ㅇ 검토대상 : 지명공모 참여작가 응모작 4건

ㅇ 검토내용 : 제작가능성, 예산 적합성, 기술적 실행 가능성, 구조 안전성 등

ㅇ 검토위원 : 설계, 시설, 구조 분야 전문가 및 전문 제작자 등 3~5인, 작품선정 심사위원회 사전 서면 검토

ㅇ 질의방법 : 질의 작성ㆍ취합ㆍ번역 후 작가 전달(이메일)

- 해외작가 대상 실시간 질의가 어려움에 따라 사전 질의를 진행하고, 최종 작품 심사에서 질의답변서를 포함하여 평가 진행

ㅇ 검토 및 질의일정 : ’24. 5. 30.(목) ~ 6. 2.(일)

- 기술검토회의 : 24. 5. 30.(목) / 분야별 전문가 집합회의 및 질의 취합

- 작품선정 심사위원회 서면검토 및 질의취합 전달 : 24. 5. 31.(금) ~ 6. 2.(일)

ㅇ 작가답변취합 : ’24. 6. 3.(월) ~ 6. 5.(수)

□ 작품선정 심사위원회 ※작가선정위원회 중복참여 불가

ㅇ 심사일정 : ’24. 6. 11.(화)

ㅇ 심사위원 : ******************************

ㅇ 심사방법 : 작가별 질의답변 사전 검토 후 집합심사

- 질의답변 사전 검토 : 24. 6. 7.(금) ~ 6. 9.(일)

- 작품제안서, 설계도면, 설명영상, 기술검토 질의응답 등 평가

ㅇ 심사기준 : 독창성(30), 공공예술성(30), 실현가능성(20), 유지보수용이성(10), 협업가능성(10)  ※해외작가의 경우 국내 제작ㆍ설치 가능 수준 고려

ㅇ 선정대상 : 당선작 1건, 예비(차순위) 당선작 1건

- 심사 기준에 따른 고득점순으로 1등 당선작 및 예비 당선작 선정

- 1등 당선작은 우선협상권을 가지며 협상이 결렬될 경우 예비 당선작 협상 진행

ㅇ 당선작 특전 : *************************************

* ***********************************

******************

********************************

3. 작품 검토, 심의, 제작, 설치

□ 작품 실시설계 및 지반 구조ㆍ안전 검토

ㅇ 검토기간 : ’24. 6월 중순 ~ 7월 초

ㅇ 검토내용 : 작품 세부 실시설계, 지반 안전성, 구조, 기상 여건 등 전문가ㆍ기술사에 의한 검토 및 사전 테스트 진행

- 작품 도면(3D시안), 랜더링, 소재, 구조, 내구성, 안전성 검토 및 실시설계 진행

- 지반구조, 지장물(전기, 통신, 우수관), 기초공사 및 보강 필요 면적 검토

- 계절식물, 수목 등 식재 및 복구 범위, 소방 등 시설물 확인

※ 검토 과정에서 구조ㆍ안전 등 보완이 필요한 부분이 생길 경우 당선작가에게 보완 요청 후 제작 진행

※ 단 문제사항을 해결하지 못하거나 안전 등 문제로 작품 제작 진행이 어려울 경우 차순위 당선작가와 협상 후 작품 제작 추진

□ 관련 심의 절차 이행

ㅇ 공공미술위원회 심의 : ’24. 6월 3주

ㅇ 도시공원위원회 심의 : ’24. 7월 ※공공미술위원회 심의 의견수렴 및 실시설계 포함

□ 작품 제작ㆍ설치

ㅇ 작품제작 : ’24. 7월 말 ~ 9월 말 (10~12주)

ㅇ 작품 설치, 시범운영: ’24. 10월 1~2주

ㅇ 작품개장 : ’24. 10월 3주

ㅇ 소요예산 : ******

ㅇ 작품 존치기간 : 설치 완료 후 최소 3년

※ ‘24~’26년(3개년) 간 매년 1개작 설치 예정

ㅇ 작품 제작·설치·운영 관련 협조 : 서부공원여가센터

*****	************	*******
****** ******	*********************************	***
	************************************	*****
	*********************************	***
	*****************************************	***
	*************************************	*****
	**	*****
*****	************************************	******
*****	***********************	******
	*******************	*******
	**	*******
********		*******

3		소요예산

□ 소요예산 : *********  ********************

※추진 과정에서 세부 일정 및 집행계획은 변경될 수 있음