문서번호	정수시설과-993
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이진근		최병희	03/25
			代최병희
협 조
	주무관			최경민

「배출수 재처리장 PAC 약품탱크 설치」

설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

강북아리수정수센터

정수시설과

「배출수 재처리장 PAC 약품탱크 설치」

설계변경 시행 보고

배출수 재처리장 PAC 약품탱크 설치 공사 시행 중, 제경비 정산에 따른 계약금액변경 사항이 발생하여 다음과 같이 시행코자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 배출수 재처리장 PAC 약품탱크 설치 공사

□ 사업내용

◯ PAC 약품탱크(20㎥, PE) 부설

◯ 약품 공급배관 및 밸브 설치

◯ 탱크, 배관 보온 및 사다리, 핸드레일 등 설치

□ 계약금액 : ************

□ 공사기간 :‘24. 02. 26 ~ ‘24. 03. 24.

□ 도 급 자 : **********************

Ⅱ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 제비용 정산에 따른 내역서 변경(붙임 참조)

- 산업안전보건관리비 사용 증빙내역 미제출에 따른 1,131,999원 감액

□ 계약금액 변경

구 분	당초(원)	변경(원)	증감액(원)	비 고
도 급 비	**********	**********	**********
공급가액	**********	**********	**********
부 가 세	*********	*********	********

Ⅲ		행 정 사 항

□ 설계변경 내역으로 변경계약 시행

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 변경계약 합의서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.