문서번호	공원시설과-2340
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
유재우		양돈욱	03/25
			허현수
협 조
	자연성회복과장			최영준
	주무관			이정규

『광나루한강공원 수영장 재조성사업』

전기 및 통신 공사 추진계획

2024. 3.

공   원   부

(공원시설과)

『광나루한강공원 수영장 재조성사업』

전기 및 통신 공사 추진계획

광나루한강공원 수영장 재조성사업 관련하여 전기시설물(분전반,조명) 및 통신시설물(CCTV,방송장비) 설치•공사 계획을 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 자연성회복과-593호('24.1.25.)

ㅇ 광나루한강공원 수영장 재조성사업 시설공사 추진계획

Ⅱ		사 업 개 요

□  위    치 : 광나루한강공원 수영장(9,630㎡)

□  기    간 : 착공일 ~ 2025. 12. 5.

□  내    용 : 전기시설물 및 통신시설물 설치

□  총사업비 : 금412,769,000원

구 분	도 급 비	관 급 비	합 계	비 고
전기공사	*************	************	*************	**********

Ⅲ		추 진 계 획

□ 전기공사

ㅇ 총공사비 : *************

ㅇ 주요내역

- 공원등주(60W) 18개 및 분전반(10회로) 1면 설치

- F-CV(1C*185㎟) 4열 포설

- 폴리에틸렌전선관(54mm) 905m

ㅇ 계약방법 : ******

- **********************************

□ 감리용역

ㅇ 용 역 비 : ************

ㅇ 추진근거 : 「전력기술관리법」제12조 2항 및 동법 시행령 제20조                    2항 1호「전기사업법 시행규칙」제3조 1항

- 일반용전기설비 기준용량(75kW)을 초과할 시 자가용전기설비로 분류(공사감리 대상)

- 본 전기공사의 계약전력 : 156kW

ㅇ 계약방법 : ****

-******************************************

구 분	도 급 비	관 급 비	합 계	비 고
통신공사	************	************	*************

- ********************************

□ 통신공사

ㅇ 총공사비 : *************

ㅇ 주요내역

- CCTV 4개소 및 옥외형 스피커 8개소 설치(관급자 관급)

- 광케이블 4C 포설(292m)

- 광케이블 8C 포설(240m)

- 폴리에틸렌전선관 28mm 설치(882m)

ㅇ 계약방법 : ****

-******************************************

- *******************************

Ⅳ		향 후 일 정

□ 2024. 3. 25. ~ 28.  : 전기•통신공사 계약의뢰

□ 2024.  3. 25. ~ 4. 5. : 기술용역 타당성심사 및 감리용역 착공

□ 2024. 4. 15. ~ 4. 29. : 전기•통신공사 착공

□ 2024. 5.  1. ~ 12. 31.: 전기•통신공사 시행(1차)

□ 2025. 1. ~ 12. 5. : 전기•통신공사 시행(2차) 및 준공

붙임  설계서 1부.  끝.