문서번호	정수시설과-2851
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박성신		이재복	03/25
			최철웅
협조
	주무관		김현철

『2023년 전기설비 유지보수공사(2차)』

설계변경 및 계약금액 조정 시행 보고

2024. 03.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『2023년 전기설비 유지보수공사(2차)』

설계변경 및 계약금액 조정 시행 보고

정수시설과장 : 이재복☎3146-5370 / 담당 : 박성신☎3146-5380

『2023년 전기설비 유지보수공사(2차)』시행 중 시공물량 변경 및 신규공정이 발생하여 아래와 같이 설계변경 후 계약금액 조정을 시행코자 함.

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 전기설비 유지보수공사(장기계속계약)

ㅇ 계약내용

구 분	총 차	1 차	2 차
계약금액	**********	**********	**********
공사기간	2023.4.11. ~ 2024.3.30.	2023.4.11. ~ 2023.12.31.	2024.1.1. ~ 2024.3.30.

ㅇ 계약업체 : *****************

ㅇ 공사내용

- 수배전반 등 전기설비 고장 또는 긴급상황 발생 시 신속한 보수

- 노후 전기설비 예방정비 및 소규모 보수공사 시행

- 전기설비 안전진단 및 각종 점검결과 부적합사항 보완·개선 등

□ 변경사유

ㅇ 작업지시에 따른 2차 계약분 시공물량 증·감 및 신규공종 발생

ㅇ 2차 계약분 보험료 및 고용개선지원비 미 집행에 따른 비용 정산

□ 변경내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증·감
총차	74,586,000원	75,346,420	증 760,420원(1.0%)
1차	62,569,000원	62,569,000	변경없음(준공)
2차	12,017,000원	12,777,420	증 760,420원(6.3%)

※ 상세 변경내역은 붙임 설계변경 내역서 참조

□ 조치의견

ㅇ 상기 변경내역에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 타당성 및 적정성 심의

ㅇ 심의위원회 심의결과를 반영하여 2차 계약분 설계변경 금액 확정

□ 향후계획

ㅇ 자체 설계변경 심의위원회 개최

- 개최일시 : 2024.3.25.(월) 10:00 ~ 11:00

- 개최장소 : 정수시설과 사무실

- 심의방법 : 서면심의

- 심의위원

▶ 위원장 : 정수시설과장

▶ 위  원 : 시설6급 신왕근, 전기6급 김현철, 시설7급 성민제, 공업7급 김한별

- 주요 심의내용

▶ 설계변경 타당성

▶ 공종별 물량변경에 따른 설계변경 적정성 여부

ㅇ 설계변경 및 변경계약 체결

ㅇ 1차 계약분 준공 및 대가 지급

붙 임 : 1. 설계변경 검토내역서(2차 1회 및 총차 2회) 각 1부.

2. 설계변경 검토의뢰서 1부.

3. 설계변경 심의위원회 의견서 양식 1부.

4. 설계변경 검증확인서(2차) 1부.  끝.