문서번호	기술진단과-2550
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
최대진		김진보	03/25
			어용선
협조

암사정수센터 수충압설비 기술진단 용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 03.

생 산 부

(기술진단과)

암사정수센터 수충압설비 기술진단 용역 추진계획

생산부장 :어용선☎3146-1301 기술진단과장 :김진보☎1360 담당 :최대진☎1365

암사아리수정수센터 수충압설비에 대한 기술진단 용역을 실시하고 정상운영 등을 종합적으로 평가하여 최적의 설비운영 방향을 제시하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ「수도법」시행규칙 제28조(정수장에 대한 기술진단의 구분 등)

- 기계분야 15항목 중 수충압분야(진단시 위험하고 고가의 측정장비 필요)

ㅇ 2024 정수센터 전문 기술진단 추진계획(기술진단과-845, 2024.01.31.)

Ⅱ		추 진 계 획

□ 설비현황

구 분		설비명	용량	수량	설치년도	제조사	비고
1정수장	서초	압력용기	20㎥, 10kgf/㎠	2대	2020	㈜지텍
		공기압축기	0.8㎥/min, 5.5kW	2대	2020	한신
2정수장	방배	압력용기	-	-	-	-
		공기압축기	-	-	-	-

<1정수장①-압력용기>		<1정수장②-공기압축기>

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 암사아리수정수센터 수충압설비 기술진단 용역

ㅇ 용역기간: 착수일로부터 2개월

ㅇ 용역내용: 기초자료조사 및 육안 및 동작검사, 시뮬레이터를 이용한 성능

동작 시험 및 공기압축기 용량 적정성 평가

ㅇ 용역금액: **********************

ㅇ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 시행방법

ㅇ 관련근거: 지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목(2천만원 이하)

ㅇ 계약방법: 수의계약

ㅇ 대상업체: **************************************

ㅇ 사    유: 추정가격 2천만원 이하 소액계약으로 수충압설비 제조 납품 및

기술진단을 수행한 경험이 있는 업체 선정

□ 세부 과업내용(세부내용 과업내용서 참조)

연번	구 분	점 검 항 목	비고
1	압력용기	ㅇ 외관 및 도장검사 ㅇ 안전밸브 세팅값 적정성 ㅇ 철판 두께 측정, 접지상태 확인
2	LCP(자동제어반)	ㅇ V-Meter 상태 확인 ㅇ 컨트롤러 수위 값 및 압력 값 점검
3	공기압축기	ㅇ 용량 적정성 평가 ㅇ V-Belt 상태, 운전전류 확인, 절연저항 ㅇ EOCR 세팅값 및 Trip 테스트
4	급기/배기 전자밸브	ㅇ 외관 및 누기, 역류 확인 ㅇ Delay Time 확인
5	배관 및 기타 센서 및 계기류	ㅇ 과업내용서참조

Ⅲ		추 진 일 정

ㅇ ’24. 3월: 용역 계약의뢰

ㅇ ’24. 4월: 용역계약 및 착수

ㅇ ’24. 6월: 최종보고 및 용역 준공

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 견적서 각 1부.  끝.