문서번호	시설보수과-2041
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		임형규	03/26
			이경우
협조

『신월IC 보수공사』 발주계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 03

강서도로사업소

[시설보수과]

『신월IC 보수공사』

발주계획 검토 보고

2024년도 본예산 사업으로 추진 예정인『신월IC 보수공사』에 대한 발주계획 검토 보고 임

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 신월IC 보수공사(2024년)

□ 위    치 : 남부순환로 ~ 경인고속도로 교차지점(신월IC)

□ 사업개요 : 교면포장 및 방수 20.16a 등

□ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 180일간

□ 사 업 비 : 485백만원

※ 예산과목 : 교량안전과,교량관리,고가차도 및 입체교차로 관리,신월IC보수공사,시설비및부대비,시설비

Ⅱ		그간 추진사항

□ 추진사항

○ 2024년도 본 예산 : 485백만원

○ 2023.12.27 : 공법관련 가격제안서 접수

○ 2024.01.12 : 공법선정위원회 개최

○ 2024.01.15 : 공법선정위원회 개최결과 보고

- 대상공법 : 교면방수

- 선정공법 : EG-COAT 교면방수공법(특허 제10********호: 별첨 협약서)

※ 계약심사 : 비대상(추정금액 5억원 이하로 비대상)

Ⅲ		추진계획

□  공사비 : 총 485,000천원

○ 도급비 386,650천원, 관급비 78,723천원, 이전비 19,627천원

□  발주방법

○ 일반경쟁입찰 : 지역제한(추정가격 10억미만 전문공사)

※ 행정안전부 예규·고시 제89호(2019.10.8.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장(제한입찰 운영요령)

□  입찰참가자격

*****************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************

***************************************************

***************************************************

************************

******************************************

□  기타

○ 건설폐기물 처리

- 소요예산 : 18백만원

- 처리물량 : 폐콘크리트 2.5톤, 폐아스콘 331톤, 혼합폐기물 95톤

- 발주방법 : 별도 통합발주 예정

Ⅳ		향후계획

□ 2024. 3월 : 공사발주 및 입찰공고

□ 2024. 4월 : 계약 및 착공

□ 2024. 4월 ∼ 10월  : 공사시행 및 준공

따로붙임  공사설명서 및 협약서 각 1부.  끝.