문서번호	총무과-4847
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
청사팀장	총무과장		경영관리부장		서울아리수본부부본부장		서울아리수본부장
곽대근	박은섭		안병희		박진순		03/26
							한영희
협 조
	녹색에너지과장					임미경
	생산부장					代김형준
	열에너지사업팀장					오수년
	기획예산과장					문병기
	재무회계과장					공미순
	기전설비과장					윤양호

『남부수도사업소』

지열시스템 설치공사(2차) 발주 계획

2024. 3.

아리수본부

(경영관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□	에너지관련 범령 검토
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□	온실가스 저감사업
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『남부수도사업소』

지열시스템 설치공사(2차) 발주 계획

경영관리부장 :안병희☎3146-1101 총무과장 : 박은섭☎1110 담당 :곽대근☎1131

남부수도사업소에 지열시스템을 설치하여 청사 냉·난방에 활용함으로써 온실가스를 저감하고 에너지를 절감하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 청사 그린 리모델링 추진계획『서울시 상수도 종합계획 2040(아리수 2.0)』

□ 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제26조

□ 서울특별시 에너지 조례 17조(신재생에너지 이용 보급)

□ 지열에너지 건물 확대 방안 마련 (시장 요청사항, 23년 78번)

Ⅱ		현황

□ 남부수도사업소 청사 냉·난방 설비 현황

ㅇ 청사 냉·난방설비 현황

청 사	연면적(㎡)	용 도	냉·난방 시설	건물 준공	비 고
****	*****
****	*****	****	**********	*****	****
****	***	*********	***	*****
****	***	*********	***	*****

※ EHP(Electric Heat Pump) : 전기식 냉·난방기

ㅇ 본관동 냉·난방시설

- 냉·온수기(120RT) + EHP(입형)

- 냉·온수기는 2012년 준공으로 내용연수(9년) 3년 경과

Ⅲ		그간 추진현황

□ 남부수도사업소 지열시스템 설치 계획수립(‘23. 9. 12.)

□ 지열시스템 설치공사(1차) 계약완료(‘23. 11. 30.)

□ 지열시스템 설치공사 설계용역 완료(‘23. 12. 20.)

□ 지열시스템 설치공사(1차) 추진 중(천공완료, 준공기한‘24. 4. 28.)

Ⅳ		사업개요

□ 공사개요

**************************************

**********************

*********************************

***********************************************

*****************************************

****************************

*******************************************

**********************

***************************************

************************************

*********************************************

ㅇ 예산과목

- 에너지생산·소비 최적화, 신재생에너지 보급, 공공시설 신재생에너지 보급 및 관리, 시설비

[ 사업비 증가 사유 ]

ㅇ ***********************************

구분	발주금액(백만원)			증가 사유	비고
	당초	변경	증감
*	*****	*****	***
**	*****	*****	***	****************************** ****************************** *************************************************	****
**	***	***	***	******************************************************* ****************************************************************
**	**	***	**	************************* ***************************

Ⅴ		2차발주계획

□ 발주 개요

ㅇ 사 업 명 : 남부수도사업소 지열시스템 설치사업

ㅇ 사업기간 : '24. 3. ~ '24. 11.

************************************

********************************

****************************************

***************************************

□ 기계, 건축, 소방분야 세부발주 내용

연번	건 명		주요내용	소요예산 (백만원)	계약방법
	*			*******
*	**	****	************************	***	****
*		****	*******************	***	****
*		****	*****************	**	****
*	**	*****	*********	**	****
*		**	*********************	**	****
*		****	*****************	***	****
*		*****	**************	***	****
*		***	***************	**	****
*	**	****	************************	**	****

□ 전기분야 세부발주 내용

연번	건 명		주요내용	소요예산 (백만원)	계약방법
	*			********
*	**	****	***********************	***	**** ******
*	**	****	*******************	***	****
*		*****	****************	***	****
*		****	***********	**	****
*	**	****	*******************	**	****
*		*****	******************	*	****
*		****	*******************	*	****
*	**	*****	******************	**	*****
*		*****	*********************	*	*****

Ⅵ		기대효과

*******************************************************************

**************************

Ⅶ		향후일정

□ 2024. 3. : 예산 재배정 요청 및 기계, 건축, 전기 공사 발주

□ 2024. 4. ~ 10. : 공사 시행 및 공정에 맞춰 관급자재 발주

□ 2024. 11. : 시운전 및 준공

붙임 1. 남부수도사업소 지열시스템 설치 계획서 1부.

2. 지열시스템 설치에 따른 효과 분석 1부.  끝.