문서번호	급수운영과-5384
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김기문	박상열	03/26
		채재일

『2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사』

사토장 변경 검토 보고

2024. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

『2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사』

사토장 변경 검토 보고

급수운영과장: 채재일 ☎3640 급수운영팀장: 박상열 ☎3680 담당: 김기문 ☎3641

『2023년 서대문구 관내 상수도 시설물 정비공사』와 관련하여 ㈜다음 및 시공사로부터 제출된 사토장 변경 실정보고서에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 2023년 서대문구 관내 상수도 시설물 정비공사

○ 공사개요 : 노후밸브 및 밸브실 정비 312개소, 배수지 환경정비

○ 계약금액 : *************

○ 공사기간 : 2023. 7. 18. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약업체 : ************

○ 공사감리 : ㈜다음 건설사업관리기술자 *****

Ⅱ		실정 보고내용

○ 당초 현장에서 발생되는 잔토를 수도권매립지관리공사가 관리하는 수도권매립지로 반입하여 처리코자 하였으나, 반입 부적정 판정을 받아 사토장 변경이 필요한 실정임.

토사 반입불가 회신 공문	토사 반입 사진

○ 변경 사토장

구 분	당 초	변 경	비 고
****	******	*****************
**** ***	*********	*****

Ⅲ		검토내용

○ 변경 사토장 선정 기준

- 사토장으로 사용 가능한 부지(면적) 및 진·출입로 확보

- 비산먼지 발생사업 신고 수리 여부

- 반입동의 절차 이행 가능 여부

○ 상기 기준을 만족하므로 변경 사토장으로 선정하고자 함.

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같이 사토장을 변경토록 승인하고 설계변경 시 정산 반영코자 함.

붙 임  현장실정보고서 1부.  끝.