문서번호	친환경건물과-4266
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		친환경건물정책팀장	친환경건물과장
김응균		이홍석	03/26
			이주영A
협조

「북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사」

공사 및 용역 준공기한 연장 조치계획

기후환경본부

(친환경건물과)

북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

공사 및 용역 준공기한 연장 조치계획

「북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사」와 관련, 감리자로부터 공사기간 연장에 대한 실정보고서가 제출되어 조치계획을 보고 드림

□ 공사개요(현황)

ㅇ 공 사 명: 북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

ㅇ 공사기간: '23. 7. 3. ~ '24. 3. 30.

******************************************

*************************************

*******************************************

ㅇ 공 정 율: 95%(건축-외부 판넬하부 마감작업, 태양광-사용전검사 준비작업)

□ 공기연장 검토

ㅇ 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건 제8절(계약기간의 연장)

- 감리자 건축공사 연장 실정보고 및 검토의견(RE23-북부-08, 2024.3.25.) 공문 제출

ㅇ 공기연장 검토

***************************************** ****************************************** ************************************

****************************************************************************

ㅇ 준공기한 연장 현황

**	***	********		**** ******	***
		***	***
*	****	********************	********************	*************
*	******	********************	********************	**********
*	*********	*********************	*********************	**********
*	***********	********************	********************	*********

□ 조치계획 : 준공기한 연장, 마무리 공사 시행에 만전을 기하고자 함

ㅇ 향후 증·감사유가 발생되는 계약건은 예산범위내에서 준공전 설계변경 및 정산

ㅇ 상기 계약건 외의 공사, 용역, 관급자재는 당초 계약기간으로 준공

ㅇ 기간연장 귀책사유: 서울특별시(북부기술교육원 마무리공사 추가 발생 등)

ㅇ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 행정사항

ㅇ 계약변경 내용(계약기간 연장)을 재무과에 계약의뢰 요청

붙임 1. 건축공사 및 폐기물처리용역 기간연장 실정보고 및 검토의견 공문 1부

2. 건축감리용역 기간연장 실정보고 공문 1부. 끝.