문서번호	시설과-2413
결재일자	2024. 3. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설과장	동부공원여가센터소장
김현태		하종식	03/27
			김인숙
협 조
	공원운영과장			유병오
	조경지원과장			최석환
	서울숲관리사무소장			김방용
	주무관			황예서

동부공원여가센터 CCTV 개선 사업 계획

동부공원여가센터 CCTV 개선 사업 계획

2024.  3.

동부공원여가센터

(시 설 과)

동부공원여가센터 CCTV 개선 사업 계획

동부공원여가센터 산하공원내에 CCTV 미설치 구간에 추가로 설치하고, 지능형 감시 프로그램을 설치하여 효율적인 감시 운영 체계를 구축하여 공원을 이용하는 시민의 안전을 확보하고자 함

Ⅰ		관련 근거

ㅇ 2024년 시 공원내 CCTV 개선사업 추진계획 알림 : 공원여가정책과-1104(2024. 1. 25.)

Ⅱ		CCTV 현황

산하공원	CCTV	CCTV 부착형 비상벨	추가 설치 개소
합 계	182	36	41
서울숲	109	15	13
시민의 숲	19	6	4
율현	26	9	11
길동생태	7	-	3
응봉	13	6	5
천호	8	-	5

※ 위례호수공원 제외

Ⅲ		사업 개요

ㅇ 사 업 명: 동부공원여가센터 CCTV 개선 사업

ㅇ 사업위치: 서울숲외 5개 산하공원

ㅇ 사업기간: 2024. 4. ~ 2024. 10.

ㅇ 총사업비: ****************

구분	사업비[원]
실시설계 용역	**********
CCTV 설치(관급)	***********
지능형 CCTV 감시 프로그램(관급)	***********

ㅇ 주요 사업 내용

- CCTV 설치 관련 실시설계 용역

- CCTV와 비상벨 설치, 광케이블 포설 공사, 통신장비 교체 등

- 지능형 CCTV 감시 프로그램 설치 1식

ㅇ 예산과목

- 푸른도시여가국 공원여가정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원 유지관리 및 이용 활성화, 공원내 CCTV 개선, 시설비(시공원 CCTV신설 400개소)

Ⅳ		사업 추진 계획

□ 실시설계 용역 발주

ㅇ 용 역 명: 동부공원여가센터 CCTV 개선 실시설계 용역

ㅇ 소요예산: *************(부가세 포함)

ㅇ 용역기간: 계약일로부터 50일

ㅇ 계약방법: 수의계약

- 지방계약법 시행령 제25조

- 2개 이상 통신 설계업체 가격을 비교하여 가장 경제적인 가격을 제시한 업체와 계약

□ 관급자재 발주

[CCTV]

ㅇ 구 매 명: 동부공원여가센터 CCTV 개선 관급자재(CCTV) 구매

ㅇ 제작기간: 계약일로부터 90일

ㅇ 계약방법: 조달구매

- 동일 특정제품의 구매금액 합계가 2천만 원(부가세 제외)을 초과하는 경우 특정제품 선정심사위원회를 구성, 제품 선정 후 계약 의뢰

[지능형 CCTV 감시 프로그램]

ㅇ 구 매 명: 동부공원여가센터 CCTV 개선 관급자재(지능형 감시 프로그램) 구매

ㅇ 제작기간: 계약일로부터 90일

ㅇ 계약방법: 조달구매

- 동일 특정제품의 구매금액 합계가 2천만 원(부가세 제외)을 초과하는 경우 특정제품 선정심사위원회를 구성, 제품 선정 후 계약 의뢰

Ⅴ		추진 일정

ㅇ 2024. 4.	실시설계 기술용역타당성 심사

ㅇ 2024. 4.	실시설계 용역 계약 의뢰

ㅇ 2024. 5.	특정제품 심사

ㅇ 2024. 7.	실시설계 용역 준공 및 관급자재 발주

ㅇ 2024. 10.	시운전 및 물품 검수

붙임  1. 실시설계용역비 산출내역서 1부.

2. 산하공원 CCTV 설치 요청 위치 1부.  끝.