문서번호	문화재관리과-4752
결재일자	2024. 3. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		세계유산등재팀장	문화재관리과장
소규섭		신영문	03/27
			김건태
협 조

변경사항 보고

(한양도성 유적전시관 전시 및 체험 환경 개선사업)

2024. 3.

문 화 본 부

(문화재관리과)

한양도성 유적전시관 전시 및 체험 환경 개선사업

변경사항 보고

「한양도성 유적전시관 전시 및 체험 환경 개선사업」진행 중 과업 일부의 변경사항 발생에 따라 준공일 연기 등 변경 계약을 체결하고자 함

□  사업 개요

○ 소요금액 : **************************

○ 대   상 : 한양도성 유적전시관 / 한양도성 혜화동 전시안내센터

○ 위   치 : 중구 소파로 46 외 13필지 / 종로구 창경궁로 35길 63

○ 사업내용

- 한양도성 완주인증서 발급용 키오스크 설치

- 한양도성 성벽 보호용 울타리 설치

- 조선신궁 배전터 앞 기둥자리 전시 설치계획

- 전시안내센터 내 스탬프 체험존, 음료수 거치대, 창고 가림막 설치

- 한양도성 성벽 앞 목주흔 표시 복구작업

○ 변경내용( 기존 사업내용 중 1개 취소 후 키오스크 설치)

- 조선신궁 배전터 앞 기둥자리 전시 설치계획 취소

→ 한양도성 완주인증서 발급용 키오스크 1대 추가설치

□  변경 발생 사유

○ 내부 방침으로 인하여 조선신궁 배전터 기둥자리 전시 재고

○ 기둥자리 전시 취소에 따른 후속 조치 및 차액 활용방안 모색

- 기둥자리 이동(유물 운송업체), 기둥자리 절단 및 보존처리(석재공장)

등 제반 협조사항 취소

- 차액 활용 방안 : 완주인증서 발급용 키오스크 1대 추가 설치

□  행정사항

○ 변경계약 의뢰(방침서 및 합의각서, 준공기한 연기의뢰서 첨부)

- 준공일 : ’24. 3. 31.(기존) → ’24. 4. 30.(변경)

- 소요액 : 변동없음

붙임 1. 변경내역서 1부.

2. 변경 계획 시안 1부.  끝.