문서번호	기전과-4159
결재일자	2024. 3. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
임현규		03/27
		차경호
협조

원인자부담공사 승인 검토 보고 「올림픽스포츠콤플렉스 조성공사 중 교통안전시설물(신호, 표지) 설치공사」

원인자부담공사 변경 승인 검토 보고

「올림픽스포츠콤플렉스 조성공사 중 교통안전시설물(신호, 표지) 설치공사」

2024. 3. 27.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경 승인 검토 보고

올림픽스포츠콤플렉스 조성공사 중 교통안전시설물(신호, 표지) 설치공사 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 승인 요청

ㅇ *****************************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명: 올림픽스포츠콤플렉스 조성공사 중 교통안전시설물(신호, 표지) 설치공사

□ 공사위치: 송파구 신천동 26번지 일대

□ 공사기간: ****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	*******	*********	********	*******
표 지		*********

□ 공사내역: 교통안전시설물(신호, 표지) 설치 공사(상세내역 붙임 참조)

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
신호	승인일 ~ 2024.01.31.	승인일 ~ 2024.03.31.
표지	승인일 ~ 2024.01.31	승인일 ~ 2024.0.31.

□ 변경사유

ㅇ 신호, 표지

- 동절기 공사진행 불가로 인하여 공사기간 연장

Ⅲ		검토 의견

□ 현장확인 및 승인 요청 서류를 검토한 바 적정하여 변경 승인 처리 하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 승인 요청 제출 서류 각 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 각 1부.

4. 설계도면 각 1부.  끝.