아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	정수과장
(경유)
제목	변경계약체결[2정수장 입상활성탄 교체공사] 보고 및 통보

1. 정수과-4136(2024.03.27.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약체결 되었음을 보고합니다(알려드립니다).

가. 건   명 : 2정수장 입상활성탄 교체공사

나. 변경사유 : 물량증감 및 보험료 정산

다. 계약업체 : 선도건설(주)

라. 변경내역

당 초			변 경
계약체결일	계약기간	계약금액(원)	변경계약 체 결 일	계약기간	계약금액(원)
2023.10.16.	2023.10.23.~ 2024.03.31	137,320,230	2024.03.28.	2023.10.23.~ 2024.03.31	120,978,000

붙임  1. 서울특별시 공사계약 특수조건 일부개정 전문(서울특별시예규 제734호)(2023.3.6) 1부.

2. 공사변경계약서 1부.

3. [붙임] (변경내역서)(2024.3.) 1부.

4. [붙임] 합의서 1부.

5. [2024.1.1]지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제271호, 23.12.21.) 1부.

	정 수 과 장
주무관	박소현		행정관리과장	代홍기석		영등포아리수정수센터소장	03/28
代신귀식
협조자
시행	행정관리과-4114	(	2024. 3. 28.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로, 11 영등포아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	number0917@seoul.go.kr	/	부분공개(5)